문서번호	한양도성도감-11817
결재일자	2019.11.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		도성보존팀장	한양도성도감과장
구선이		代박근우	11/18 안중호
협조

<서울 DDP내 한양도성 성벽 보수 정비 공사>

설계변경(정산) 검토보고

2019. 11.

문 화 본 부

한양도성도감

공사 설계변경(정산) 검토보고

서울 DDP내 한양도성 성벽 보수정비 공사에 다음과 같이 변경사항이 있어 제출된 정산보고 사항에 대한 설계변경(계약금액 조정)을 추진코자 함

공사개요

○ 공 사 명 : 서울 DDP내 한양도성 성벽 보수정비 공사

○ 공사기간 : `19. 07. 04. ~ `19. 12. 04.

○ 계약금액 : ************

○ 시 공 자 : ㈜재우씨엔씨********

추진경위

○ 2019. 3. 14. ~ 5. 27. : 한양도성 백악~남산구간 성벽 보수정비 설계용역

○ 2019. 7. 4. : 보수정비 공사 착공

○ 2019. 10. 08. : 시공자 실정보고 제출(공사 금액 및 기간 변경)

○ 2019. 10. 24. : 1차 설계 변경(공사 금액 및 기간 변경)

○ 2019. 11. 18. : 시공자 정산 보고 제출(공사 금액 변경)

변경사항

○ 계약기간 변경 : 변경 없음

○ 계약금액 변경 : 금93,882,600원****************************

※ 단가 적용기준 : 검토보고 기준일(2019년 11월) 산정단가×낙찰율 적용(87.838%)

○ 변경사유

1) 공사내용 변경 : 공사 내용 변경으로 물량 증감

- 보호구역 내 변경 : 효용성 및 미관상 통나무배수로 설치 변경(공종 삭제)

- 보호구역 외 변경 : 차량통행로에 설치되어있던 면석을 존치하기로 결정하여 이와 연동되어 마름돌 해체 및 설치(증), 기초다짐 및 사고석 포장(감), 구조물 터파기(증) 변경

공종	변경전	변경후	검토 결과
통나무 배수로 설치	22m	-	공종 삭제
통나무	207재	-	공종 삭제
상부기층(모래지정, 2~5mm깬쇄석)	5㎥	4.31㎥	물량 조정(감소)
하부기층(자갈지정, 19~25mm깬쇄석)	10.01㎥	8.62㎥	물량 조정(감소)
잡석다짐	15.01㎥	12.93㎥	물량 조정(감소)
사고석포장	100.1㎡	86.26㎡	물량 조정(감소)
구조물터파기	40.04㎥	38.81㎥	물량 조정(감소)
화강암 재료분리대 설치	42EA	18EA	물량 조정(감소)
마름돌 해체(기계장비)	9.55㎥	11.47㎥	물량 조정(증가)
마름돌 설치(기계장비)	-	9.26㎥	공종 추가
혹두기	-	12.35㎡	공종 추가
도편수	-	2.21인	공종 추가

- 운반공사 변경 : 공사 내용 변경(공종별 물량 증감)에 따른 운반공사 물량 변경

공종	변경전	변경후	검토 결과
일반자재운반	8차	7차	물량조정(감소)
자갈운반	26.02㎥	22.41㎥	물량조정(감소)
모래운반	6.4㎥	5.51㎥	물량조정(감소)
건설폐기물 상차비	117.8㎥	116.6㎦	물량조정(감소)
현장내 폐기물 및 골재운반	236.3㎥	230.6㎥	물량조정(감소)

2) 자문비 변경 : 기존 2회에서 자문 3회 실시로 자문비 정산(증액)

3) 보험료 정산

공종	변경전	변경후	검토 결과
산재보험료	*********	*********	*******
고용보험료	*******	*******	******
국민 건강 보험료	*******	*	********
국민 연금 보험료	*******	*	********
노인 장기요양 보험료	******	*	*******
산업안전 보건관리비	*********	*********	******

변경 내역

구분		당초	변경	증 감(-)	비고
순공사원가	재료비	**********	**********	**********
	노무비	**********	**********	*********
	경비	**********	**********	**********	********
순공사비 계		**********	**********	*********
일반관리비		*********	*********	*******
이윤		*********	*********	*******
공급가액		**********	**********	*********
부가가치세		*********	*********	*******
자문수당		*******	*******	*******	********
도급액		**********	**********	*********
총공사비		**********	**********	*********

○ 원가계산서

예산상 조치

○ 계약금액 변경 : 금93,882,600원****************************

○ 예산과목

1. 기존 계약금액

- 문화본부 한양도성도감, 한양도성 보존·관리·활용, 한양도성 보존·정비, 한양도성 보수·정비, 시설비(401-01) : 금74,975,090원

- 문화본부 한양도성도감, 한양도성 보존·관리·활용, 한양도성 세계유산 등재 및 시민참여 활성화, 한양도성 학술조사 및 연구, 시설비(401-01) : 금18,907,510원

2. 변경(증액) 금액

- 문화본부 한양도성도감, 한양도성 보존·관리·활용, 한양도성 세계유산 등재 및 시민참여 활성화, 한양도성 학술조사 및 연구, 시설비(401-01) : ***********

검토자 의견 및 향후 계획

○ 설계도서 검토 결과 및 현장 여건을 반영한 내역으로, 원활한 사업추진을 위해 계약변경 의뢰하고 상기의 변경 사항으로 계약 변경 후 공사 시행 및 완료

붙임  시공자 설계변경(정산) 보고서 1부.  끝.