문서번호	도로보수과-10478
결재일자	2019.11.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		도로보수과장	북부도로사업소장
박세근		이상희	11/18 고영준
협 조

2019년 관내 포장도로 불량맨홀 정비공사(연간단가) 작업계획(6차) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019.  11.

북부도로사업소

(도로보수과)

2019년 관내 포장도로 불량맨홀 정비공사(연간단가)

작업계획(6차) 검토 보고

우리사업소에서 시행중인 「2019년 관내 포장도로 불량맨홀 정비공사(연간단가)」와 관련 노후포장도로 정비공사 구간 등 포장면과 평탄성이 불량한 맨홀 정비계획을 보고 드림

▢ 사업개요

∘ 공 사 명: 2019년 관내 포장도로 불량맨홀 정비공사(연간단가)

∘ 공사기간: 2019. 3. 11. ~ 12. 31.

∘ 공사개요: 불량맨홀 정비 700개소

∘ 총공사비: *********(도급비 865,984천원, 이전비 9,016천원)

∘ 도 급 자: **************

▢ 6차 작업계획 내용

∘ 작업기간: 2019. 11. 19. ~ 12. 20.

∘ 사전협의 물량: 235개소

∘ 작업계획 물량: 207개소

(단위: 개소)

구분	물량	구분	물량	구분	물량
하수도	45	전기	20	소화전	12
상수도	83	통신	45	기타	2

∘ 예산집행현황

(단위: 천원)

구분	계약금액	작업완료금액 (1∼5차)	잔액	개략공사비 (6차 작업)	비고 (잔여예산)
도급비	865,984	622,774	243,210	246,519
이전비	9,016	-	9,016	-
합계	875,000	622,774	252,226	246,519	5,707

▢ 조치계획

∘ 상기 작업계획 물량(207개소)에 대해「2019년 관내 포장도로 불량맨홀 정비공사(연간단가)」에 작업지시하여 정비하고자 하며,

∘ 도급비 부족금액(3,309천원)은 이전비에서 반영하여 추후 시공물량 정산 및 설계변경을 시행하고자 함.

붙임  1. 작업지시서(6차) 1부.

2. 설계내역서(6차 작업지시) 1부.

3. 위치도 및 사진(6차) 1부(별도첨부).  끝.