문서번호	토목부-20942
결재일자	2019.11.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	토목설계과장	토목부장
김종혁	김동현	11/18 김용제

- 월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계 소규모 환경영향평가용역 -

준공기한 연기 검토 보고

2019. 11.

도시기반시설본부

토목부

- 월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계 소규모 환경영향평가용역 -

준공기한 연기 검토 보고

『월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계 소규모 환경영향평가』용역자가 제출한 준공기한 연장 요청에 대하여 검토 보고 드림.

※ 다원피앤디 제-19-3101호(2019. 11. 15., 과업이간 연장 요청의 건)

□ 용역 개요

❍ 용 역 명 : 월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계 소규모 환경영향평가용역

❍ 규    모

- 연결로 Ramp A~F 보완(폭 1차로), 월드컵대교 남단 강남방향 지하차도→교량으로 변경, 접속교 종단선형 변경 및 Ramp-D, Ramp-H 신설

❍ 용역기간 : '19. 5. 23. ~'20. 3. 23.

❍ 도 급 비 : 83백만원

❍ 용 역 자 : ㈜다원피앤디

□ 준공기한 연장

❍ 준공기한 연기 : 121일

- 용역기간 : 당초  '19.5.23.~'19.11.23.⇒ 변경 '19.5.23.~'20.3.23.

❍ 지체상금 : 미부과

❍ 귀책부서 : 서울특별시

❍ 연기사유 : 「월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계」진행 경과에 따라 수질오염물질 배출부하량 할당과 소규모 환경영향평가용역의 한강유역환경청 협의 기간이 필요하여 소규모 환경영향평가용역의 준공기한을 연기하고자 함

□ 조치의견 : 준공기한을 '20. 3. 23.까지 연기하여 용역을 관리하고자 함.

붙임 : 계약기간 연장 요청 공문 및 합의 각서 각 1부. 끝.