투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(도로계획과장)
(경유)
제목	측량비 실정보고건관련 설계변경 요청(노들로 구조개선 기본 및 실시설계)

1. 토목부-20933호(2019.11.18.)와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행 중인『노들로 구조개선 기본 및 실시설계』관련 아래와 같이 설계도서의 측량수량 상이에 따른 설계변경 사항에 대하여 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 노들로 구조개선 기본 및 실시설계

나. 용역개요 : 노들로 구조개선(연장 8.5km)

8차로(B=41.0m, 양화교 ~ 양화대교 남단)

4차로(B=17.5m, 양화대교 남단 ~ 한강대교 남단)

다. 용 역 사 : ㈜동명기술공단, ㈜도화엔지니어링, ㈜동희이앤씨

라. 변경내역

구 분	기본 및 실시설계		증·감
	당 초	변 경
용역기간	′19.04.22.～′20.02.15.	′19.04.22.～′20.02.15.	변경없음
용역금액	379,470,000원	580,693,000원	증)201,223,000원

마. 설계변경 사유 : 설계내역서와 과업현장 측량연장 수량(당초 연장0.85km→ 변경 연장 8.0km) 상이

붙임 : 측량비 실정보고건 검토보고서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	조재근		토목설계과장	김동현		토목부장	11/19 김용제
협조자
시행	토목부-21003	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2589	/전송	02-3708-2599	/		/	부분공개(5)