투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰

우리 부에서 시행 중인 “월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계 소규모 환경영향평가용역” 에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계 소규모 환경영향평가용역

나. 위    치 : 월드컵대교 남단 일대

다. 용역규모

- 연결로 Ramp A~F 보완(폭 1차로), 월드컵대교 남단 강남방향 지하차도→교량으로 변경, 접속교 종단선형 변경 및 Ramp-D, Ramp-H 신설

라. 계 약 자 : ㈜다원피앤디

마. 계약변경 내역

구 분	당 초	변 경	증 / 감	비 고
계약금액	***********	***********	*	변경없음
계약기간	************ *************	************ **************	******	기간연장

바. 귀책소재 및 연기사유

- 연기에 따른 귀책소재 : 계약자 귀책사유 없음

- 지체상금 부과여부 : 미부과

- 연기사유 : 「월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계」진행 경과에 따라 수질오염물질 배출부하량 할당과 소규모 환경영향평가용역의 한강유역환경청 협의 기간이 필요하여 소규모 환경영향평가용역의 준공기한을 연기하고자 함

붙임 : 1. 준공기한 연기 보고서 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 용역계약서 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

	토목부장
주무관	김종혁		토목설계과장	김동현		토목부장	11/19 김용제
협조자
시행	토목부-20983	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 12층 서울시 도시기반시설본부 토목부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2591	/전송	02-3708-2599	/	mindle93@seoul.go.kr	/	부분공개(5)