문서번호	정수시설과-12505
결재일자	2019.11.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
박희정		양영민	11/19 代김성철
협조
	주무관		김희수

『제2정수장(송수동) 고압인입케이블 교체 전기공사』관련

전기공사 준공기한 연장 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 11.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

『제2정수장(송수동) 고압인입케이블 교체 전기공사』관련

전기공사 준공기한 연장 검토 보고

2송수동 고압인입케이블 전기 공사와 관련하여 감리사로부터 설계변경을 위한 공기연장이 필요하다는 실정보고가 있어 이를 검토하고 보고드림.

1		공사 개요

○ 공 사 명 : 제2정수장(송수동) 고압인입케이블 교체 전기공사

○ 공사내용 : 전력케이블 2회선, 맨홀 2기, 전선관 트라프 매설 등

○ 계약금액 : 금284,496,950원

○ 공사기간 : 2019. 07. 08. ~ 2019. 10. 25.

○ 계 약 자 : ㈜모아종합전설 대표이사 이근효

○ 공 정 율 : 실공정율 100%(계획공정율 100%)

○ 감 리 사 : ㈜극동문화전기설계 대표이사 김경용(※현장감리원 고민혁)

2		관련 근거

○ 지방자치단체 계약 및 입찰 집행기준 제13장 공사계약일반조건

- 제8절 2항 우선 시공에 따른 설계변경으로 인한 계약기간의 서면 연장 청구

○ 감리사 극동(암사정수장)1914호(2019.11.18.) 공기연장 실정보고의 건

- ㈜모아종합전설의 공기연장 실정보고자료를 검토한 결과, 공기연장이 필요하다 사료됨

3		설계 변경

○ 변경 내용 : 공사기간 5일 연장

구 분	당 초	변 경	비 고
공 사 기 간	’19.07.08.~’19.11.24.	’19.07.08.~’19.11.29.	증 5일

○ 변경 사유 : 현장 실정을 반영한 설계변경내역서 작성을 위한 5일 기간 연장

○ 보고자 검토 의견

- 상기 감리사가 제출한 실정보고 사항 등이 계약 관련한 법령에 적합하여 해당 공사의 시공내용대로 설계변경을 시행함이 타당함

4		향후 계획

○ 2019. 11. 22.   공기연장 계약 완료

○ 2019. 11. 29.   설계변경 및 공사 준공

붙임  1. 감리사 보고서(공기연장의 건)

2. 시공사 합의각서.  끝.