문서번호	원수관리과-1623
결재일자	2019.11.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
김종원		정임근	11/19 서대훈
협 조
	주무관			김효준

“상수도본부 발족 30년, 수돗물통수 111년, 믿고 마시는 아리수!”

『강북통합취수장 조류차단막 및 오일휀스 철거·설치 공사』

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

2019.  11.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

『강북통합취수장 조류차단막 및 오일휀스 철거·설치공사』

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

우리센터에서 시행중인 『강북통합취수장 조류차단막 및 오일휀스 철거·설치공사』에 대하여 설계변경 심의위원회를 개최하고 그 결과를 보고함.

□ 설계변경 심의대상

○ 공 사 명 : 2019년 강북통합취수장 조류차단막 및 오일휀스 철거·설치 공사

○ 공사기간 : 2019. 6. 3. ~ 2019.11.20.

○ 계약금액 : ************

○ 계 약 자 : **************

□ 심의 개최 현황

○ 일    시 : 2019년 11월 18일(월) 15:00

○ 심의장소 :  원수관리과 사무실

○ 참석인원 : 총 4명

- 위 원 장 : 원수관리과장

- 심의위원 : 공업6급 김효준,공업6급 김대용,공업7급 이승수

□ 설계변경 주요사항

○ 계약물량의 신규공정 발생

신규공정	당초	변경	사유
******	*	***	*****************
*****	*	*******	*****************

○ 법령에 따른 제경비 항목 감(4항목) 발생

- 건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양보험료,산업안전보건관리비

□ 설계변경 현황

○ 계약금액 변경

- 당  초 : ************

- 변  경 : **************************

□ 설계변경 금액

구 분	금액		증·감	비 고
	당초	변경
도급비	**********	**********	**********	****** *******

□ 주요 변경내역

○ 주요공종 물량에 따른 순공사비 증액내역

연번	공 종	금액		증·감	내 용
		당초	변경
1	폐기물운반 처리	*	*********	*********	******************액
2	고재	*	**********	**********
계	폐기물+고재		*********	*********

○ 제경비 등 법령에 따른 비용 감액내역

연번	공 종	금액		증·감	내 용
		당초	변경
1	건강보험료	*******	*	*******	********
2	연금보험료	*********	*	*********
3	노인장기요양보험	******	*	******
4	산업안전 보건관리비	*********	*	*********
5	일반관리비	*********	*********	*******	**********
6	이윤	*********	*********	*******	*************

□ 심의 내용 및 결과

구 분	심의 내용	결정 내용
조류차단막 및 오일휀스 철거·설치공사	〇 설계변경 타당성	〇 설계 타당함
	〇 신규공종 단가산출 타당성	〇 신규공종 타당
	〇 제경비 적정산정 및 적용	〇 제경비 실비정산 등 적정
	〇 각종 제반규정 준수여부	〇 제반규정 준수

* 본청 계약금액조정시스템에 의한 제비율 검증 실시(2019. 11. 13)

□ 조치의견

○ 공사 설계변경 심의결정 내용과 같이 물량 및 계약금액에 대한 설계변경을 시행코자 합니다.

붙임 : 1. 설계변경 심의 의결서 1부.

2. 계약금액조정(기술심사담당관) 1부.

3. 심의 의결된 변경설계서 1부.