문서번호	급수운영과-23888
결재일자	2019.11.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
조은성	代김재영	11/20 유승효

작 업 계 획 서

(중계동 원인자이설)

2019. 11.

북부수도사업소

(급수운영과)

작 업 계 획 서

(중계동 원인자이설)

※ 노원구청 치수과에서 시행중인「하계배수분구 하수관로정비공사」관련 상수도 원인자 이설공사임.

□ 공사현황

- 공 사 명 : 하계배수분구 하수관로정비공사 중 상수도 이설공사

- 공사위치 : ********************

- 공사개요 : **********************

- 시공회사 : *****************

- 공사일정 : 2019. 11. 22(금) 09:00 ~ 23:00 (총 14시간)

□ 공사배관 상세도

배관상세도	위치도

□ 공사소요시간

작 업 계 획	소요시간	비 고 (산출근거)
제수밸브개폐	1시간	******************************* ******************************* *******************************
기존관절단 및 퇴수	5시간	*****************************
배관	6시간	********************* ************************* ************************
세척 및 통수	2시간	********************
합 계	14시간

□ 자재준비계획

번호	품 명	규 격	단위	수량	비고
1	KP직관	600	본	2
2	KP소켓곡관	600*45	개	4
3	KP소켓프렌지T형관	600*80	개	1
4	KP이음관	600	개	4
6	이탈방지압륜	600	개	14
7	KP고무링	600	개	14
8	KP볼트	24*105	개	196
9	제수밸브	80	조	1
10	배기변	80	조	1
11	원형철개(배기변)	648	조	1

□ 장비확보계획

번호	장 비 명	규 격	단위	수 량	비 고
1	백호우	130W	대	1
2	백호우	60W	대	1
3	덤프	15TON	대	1
4	양수기	65㎜	대	3

□ 인력확보계획

연번	구분	성명	자격	인원수	비고
계				5
1	배관공	***	**
2	배관공	***	**
3	배관공	***	**
4	인 부	***
5	인 부	***

□ 수계조정 및 퇴수작업계획

○ 수계조정 계획 : 해당없음

○ 퇴수작업 계획

*****************************************

*******************************

□ 담당 및 시공업체 연락

구 분	책 임 자	전 화
담 당 (시행부서)	********************************** ***********************************	************ *************
업 체	**************** ************** **************	*************

□ 시험굴착계획 : 해당없음

□ 공사장에 대한 안내간판 및 안전시설 설치

단수 및 통수시 변류 조절계획

□ 밸브조절 위치도

□ 조절대상 및 담당자

〇 단  수

구 분	순서	위 치	규 격	수 량	이상유무	담당자
****	*	*******	*******	*	****	*******
****	*	*******	*******	*	****	*******
****	*	*********	*******	*	****	*******

〇 통  수

구 분	순서	위 치	규 격	수 량	이상유무	담당자
****	*	*******	*******	*	****	*******
****	*	*******	*******	*	****	*******
****	*	*********	*******	*	****	*******

끝.