문서번호	설비부-18420
결재일자	2019.11.20.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
정찬교		오삼록	11/20 임정규
협조

『남산예장자락 재생사업 전기공사』

설계변경(2차 제1회) 검토보고

2019. 11.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『남산예장자락 재생사업 전기공사』

설계변경(2차 제1회) 검토보고

『남산예장자락 재생사업 전기공사』`19년도 사고이월된 예산의 효율적 사용을 위해 2차공사 계약금액 조정하고자 함.

[2차공사:⇩36,544천원 /장래차:⇧36,544천원 /총차:변동 없음]

1		공사개요

□  공 사 명 : 남산예장자락 재생사업 전기공사

□  규 모 : 지하주차장(버스39면, 소형2면) 5,679m2, 부대시설 1,532m2

□  공사기간 : `17.08.01~`20.12.31

□  공 사 비 : *************************************

□  시 공 사 : **************************

□  감 리 사 : ㈜동성엔지니어링 외 1개사

□  공 정 률 : 28%(매입배관 시공 진행)

2		관련근거

□ 남산예장 제2019-518호(`19.11.15) : 건설사업관리단 설계변경 검토보고

3		설계변경 내용(2차공사)

□  2차공사 계약금액 조정

○ 변경사유 : 선행공사 준공기한 연기(`19.12월→`20.12월)로 인해 2차         공사기간 내에 목적물 달성이 어려운 부분은 장래분으로 조정하고, 시공         가능한 부분을 2차공사에 반영

○ 물량조정 내역(금액기준)

공종	공사금액(단위:원))
	변경 전	변경 후	증감액
전력인입	*******	*******	********
수변전설비	*	*******	*********
전력간선	**********	*	************
동력공사	**********	*******	************
냉난방설비	**********	*********	***********
전열공사	*********	*********	*********
전등공사	**********	**********	***********
케이블트레이공사	*	**********	************
전력 및 조명제어	*********	*******	***********
주차관제	*********	*******	***********
옥외가로등	*	**********	************
직접공사비	***********	***********	************
간접공사비	**********	**********	************
물가변동	*********	*********	********
도급금액	***********	***********	************

□ 차수별 계약현황                                        (단위:원)

차수	변경 전	변경 후	증감	공사기간
1차	***********	***********	변경없음	`17.08.01~`18.11.30
2차	***********	***********	감)36,544,000	`18.12.07~`19.12.10
장래차	*************	*************	증)36,544,000	미계약
합계	*************	*************	변경없음	`17.08.01~`20.12.31

4		보고자 의견

□ 본 차수계약 건은 `19년도 사고이월된 예산으로 금년도 집행 불가한        금액은 설계변경하여 감액처리 하고, 차액은 관급자재로 대가 지급하여        예산불용을 최소화 하고자 함.

붙임 : 감리단 공문 1부. 끝.