건설공사 설계변경 사전심의 의견서

부분공개(5)

1. 공사명: 장지동 840 외 4개소 배급수관정비공사

신청부서명	급수운영과
작 성 자	송 정 호
제 출 일	2019. 11. 20.

2. 심의 위원회 의견

- 심의일시: 2019. 11. 20.(수)

- 심의의견: 설계변경에 따른 심의 결과에 대하여 아래와 같이 의견을 제시함.

위   원

직  위

성  명

서  명

의  견

위 원 장

급수운영과장

김태형

11/20

김태형

타당함

위    원

시설운영팀장

송종학

송종학

타당함

위    원

시설안전팀장

김주경

김주경

타당함

위    원

급수운영팀장

임인택

代이덕규

타당함

위    원

급수관리팀장

양재덕

양재덕

타당함

위    원

주무관

양봉우

양봉우

타당함

담    당

주무관

송정호

송정호

설계변경 심의 의견서

□ 공사현황

○ 공사명: 장지동 840 외 4개소 배급수관 정비공사

○ 공사기간: 2019. 4. 15.~2019. 11. 24.

○ 공사개요: 상수도관 부설 D=150~300㎜, L=1,530m

○ 도급액: 금528,209,650원

○ 발주청: 강동수도사업소(급수운영과)

○ 계약자: ㈜고광건영  대표 채학영

○ 감독처: 서울시설공단

□ 주요 설계변경 사유

연번	제목	주요 변경내용	공사비(증·감)	비고
1	4대보험료정산 등	-건강, 연금, 노인장기, 퇴직제비 정산 -하도급발급수수료, 건설기계대여대금 정산 -산업안전보건관리비 및 환경보전비 정산 -고재처리비 및 부지임대료 정산 -검지선 복구비용 정산	감)1,376천원
2	토공	-구간별 실 시공에 따른 물량 반영 -인입관 보도부 설치 반영	증)11,947천원
3	부설공	-주철직관 및 이형관 부설공 실수량 반영 -주름마디스텐관 부설공 실수량 반영 -부단수할정자관 부설 및 접합공, 천공분기점분기 반영	증)9,425천원
4	구조물공	-원형밸브실 설치공 실수량 반영 -중형밸브실 설치공 실수량 반영 -보차도 경계측구 설치	증)1,969천원
5	부대공	-철거자재운반 물량 실정산 -PE휀스 설치 및 철거 물량 실정산 -교통정리원, 보행안전도우미 작업일수에 따른 실정산 -작업일수에 따른 실 사용물량 정산	감)41,311천원
6	사급자재	-구간별 실 시공에 따른 사용수량 반영 -부단수할정자관 정산(300/300, 300/200)	증)21,747천원

□ 주요 변경 내역

공 종	규 격	단 위	수 량		비 고 (증,감)
			당 초	변 경
관부설	D80~300mm	m	1,530	1,284	감) 246
제수밸브	D80~300mm	개소	40	54	증) 14

□ 설계변경 금액 내역

(단위: 원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
도급비	공급가액	480,190,591	481,872,727	증) 1,682,136
	부가가치세	48,019,059	48,187,273	증) 168,214
	계	528,209,650	530,060,000	증) 1,850,350

붙임  1. 설계변경내역서 1부.

2. 원가 검증 결과 등 관련서류 각1부.  끝.