문서번호	설비부-18333
결재일자	2019.11.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	열빛총괄과장	설비부장
김현욱	여인웅	11/19 임정규

『남부도로사업소 청사 신축 전기공사』

물가변동에 따른 계약금액 조정(제2회) 검토 보고

2019. 11.

도시기반시설본부

[설 비 부]

『남부도로사업소 청사 신축 전기공사』

물가변동에 따른 계약금액 조정(제2회) 검토 보고

「남부도로사업소 청사 신축 전기공사」의 물가변동(ESC)에 따른 계약금액 조정(제2회)에 대해 아래와 같이 검토 결과를 보고합니다.

Ⅰ		관 련 근 거

㈜삼우공간 제2019-657호(2019.11.18.), 물가변동으로 인한 계약금액       조정보고서(제2회) 검토 보고(전기공사)

Ⅱ		공사개요

공 사 명 :『남부도로사업소 청사 신축 전기공사』

공사위치 : 서울시 금천구 시흥3동 963-1 외 13필지

****************************************************************

공사규모 : 지하1층/지상5층(연면적 5,361㎡)

공사내용 : 수전용량 500KVA(업무시설 300KVA, 주민편의시설 200KVA),                  태양광발전장치 50KW, 비상발전기 200KW 설치 등

************************************

************************************

시 공 사 : ㈜성제전기 대표 김팔성

감 리 사 : ㈜삼우공간건축사사무소 외 1개사

[조 감 도]	[공사현장 전경]

Ⅲ		검토내용

계약금액(ESC) 조정 조건

구분 횟수	제 1 회	제2회	비 고 (충족조건)
조 정 방 법	지 수 조 정	지수조정	적 합 (계약서 확인)
기 준 시 점	2017.10.31.	2019.09.01.	적 합 (90일 이상)
비 교 시 점	2018.09.01.	2019.09.01.
경 과 기 간	305일 경과	364일 경과
조 정 률	6.9%	3.3%	적 합 (3% 이상)

계약금액(ESC) 조정(제2회) 내용

물가변동 조정률 [A]	3.3%	물가변동 경과기간	364일	기준시점(직전조정일) : 2018.09.01.
				비교시점(조정기준일) : 2019.09.01.
물가변동 대상공사의 계약금액 [B]		1,134,393,705원		물가변동 조정기준일 현재의 공정률	예정공정률	59.395%
					실행공정률	58.076%
물가변동 적용제외 계약금액 [C]		673,774,000원		물가변동 적용대가 [D] = [B - C]	460,619,705원
선금급 공제금액 [F]		해당 없음		물가변동 등락대상 조정금액 [G] = [A × D]	***********
경유세 공제금액 [H]		해당 없음		물가변동 조정 적용금액 [I] = [G – F - H]	***********

감리단 검토의견

□ 상기와 같이「남부도로사업소 청사 신축 전기공사」와 관련하여 검토한 결과 물가변동 경과기간(364일), 지수조정률(3.30%)등이 적정하게 산출되어 물가변동으로 인한 계약금액 설계변경이 타당한 것으로 사료됨.

Ⅳ		조치의견

책임건설사업관리기술자가 검토한 전기공사의 물가변동으로 인한 계약금액(ESC) 조정(제2회) 건에 대하여 검토한 결과 적정한 것으로 판단되어 승인 통보하고자 하며 향후 설계변경시 반영하고자 함.

붙임  검토 보고서(감리단) 1부.  끝.