＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	암사아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	전기공사 변경계약 시행(2정수장 고압인입케이블 교체 전기공사)

우리 센터에서 시행 중인 「제2정수장 고압인입케이블 교체 전기공사」에 대하여 아래와 같이 변경계약 하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 제2정수장(송수동) 고압인입케이블 교체 전기공사

나. 계약금액 : 금284,496,950원(금이억팔천사백사십구만육천구백오십원)

다. 공사기간 : 2019. 07. 08. ~ 2019. 11. 24.

라. 계 약 자 : ㈜모아종합전설 대표이사 이근효

마. 변경계약 내용

구 분	당 초	변 경	증·감
계약금액	금284,496,950원	금284,496,950원	-
계약기간	’19.07.08.~’19.11.24.	’19.07.08.~’19.11.29.	증5일

바. 변경사유 : 현장 실정을 반영한 설계변경내역서 작성을 위한 공기연장

사. 지체상금 부과여부 : 미부과(우선 시공에 따른 설계변경으로 인한 계약기간의 서면 연장 청구)

붙임  1. 보고서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.

★주무관	박희정		주무관	김희수		정수시설과장	11/20 양영민
협조자	주무관	代이상욱
시행	정수시설과-12630	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131 암사아리수정수센터 (암사동)	/
전화	02-3146-5774	/전송	02-3146-5707	/	pakei27@seoul.go.kr	/	부분공개(5)