문서번호	기전과-5863
결재일자	2019.11.21.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	동부도로사업소장
황상호		오준식	11/21 송만규
협조	관리단속과장		이우승
	주무관		문준호

『옥수,금호터널 보행환경개선공사 CCTV 구매설치』

설계변경 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 11.

성동도로사업소

(기전과)

『옥수,금호터널 보행환경개선공사 CCTV 구매설치』

설계변경 검토보고

『옥수,금호터널 보행환경개선공사 CCTV 구매설치』와 관련하여 법정보험료 정산사항이 있어 설계변경 후 변경계약 및 준공코자 보고드림.

❏ 관련근거

❍“옥수,금호터널 보행환경개선공사 CCTV 구매설치”설계변경(정산) 제출의 건 - IND*******D010(2019-11-15)

❏ 계약현황

❍ 계 약 명 : 옥수,금호터널 보행환경개선공사 CCTV 구매설치

❍ 계 약 자 : ***********

❍ 계약금액 : ***********************

❍ 계약기간 : 2019. 07. 04 ~ 2019.11.30

❏ 계약변경

❍ 변경사유 : 보험료 미정산으로 인한 감액

❍ 보험료 정산

구 분	연번	품 목	금 액		비 고 (증⸳감)
			당 초	변 경
보험정산	1	건강보험	672,627	0	감) 1,666,964
	2	연금보험	937,097	0
	3	노인장기요양보험	57,240	0
	소 계		1,666,964	0

❍ 변경금액

구 분	당 초	변 경	증⸳감
공 급 가 액	77,636,364	75,969,400	감 1,666,964
부가 가치세	7,763,636	7,596,940	감 166,696
도 급 금 액	85,400,000	83,566,340	감 1,833,660

❏ 예산과목

❍ 도로시설과, 도로시설관리, 터널시설관리(도시개발특별회계), 옥수‧금호터널보행환경 개선, 시설비 및 부대비, 시설비

❏ 보고자 의견 및 향후계획

❍ 공사 현장 검수결과 공사 전반에 걸쳐 작업지시내용, 품질관리기준 및 기타 약정대로 준공되어 위의 변경내역과 같이 설계변경 후  별첨 설계변경 내역서와 같이, 기 계약된 업체와 계약변경 하여 준공 처리코자 합니다.

첨부 : 1. 설계변경 요청서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.