문서번호	기전과-6562
결재일자	2019.11.21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장	남부도로사업소장
이중현		임태수	11/21 김영삼
협조
	주무관		이태근

『2019년 교통사고 잦은 곳 개선 교통신호기공사(2차)』

실정보고에 대한 검토 보고

2019. 11.

남부도로사업소

( 기  전  과 )

『2019년 교통사고 잦은 곳 개선 교통신호기공사(2차)』

실정보고에 대한 검토 보고

2019년 교통사고 잦은 곳 개선 교통신호기공사(2차)와 관련하여, 책임감리원 공사실정보고에 대한 검토결과를 보고 드림.

Ⅰ
		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 2019년 교통사고 잦은 곳 개선 교통신호기공사(2차)

□ 공사위치

○ 관악구 남부순환로 1952[TGIS명 : 까치고개(연등)] 외 6개소

□ 공사내용

○ 제어기 교체 4대, 교통신호지주 신설 2본, 교통신호지주 교체 10본,     보행신호지주 신설 3본, 보행신호지주 교체 1본
○ 차량신호등 신설 25조, 차량신호등 교체 9조, 보행신호등 교체 8조,     음향신호기 교체 14대
○ 신호케이블 신설 2km, 신호케이블 철거 1.5km

□ 계약금액 : *****************************

□ 계약업체 : **************

□ 계약기간 : 2019. 8. 21. ~ 11. 30.

□ 책임감리업체 : *************

Ⅱ
		실 정 보 고

□ 주요 실정보고

연번	위치 (TGIS명)	변경전	변경후	변경사유	증·감 금액 (천원)
1	까치고개 (연등)	제어기 부분품(LSU) 4EA 제어기 부분품(Flash) 0EA	제어기 부분품(LSU) 1EA 제어기 부분품(Flash) 1EA	현장여건에 맞게 제어기 부분품 물량 반영	** ******
		P11차량지주(Ø300) 신설 1본 - P12가로등 통합지주(Ø250) 0본 P11보행지주(Ø150) 0본 - P11지주부착대 13m 신설 1본 - P12지주부착대 9m 신설 0본 - 가로등암 Pipe 0본	P11차량지주(Ø300) 신설 0본 - P12가로등 통합지주(Ø250) 1본 P11보행지주(Ø150) 1본 - P11지주부착대 13m 신설 0본 - P12지주부착대 9m 신설 1본 가로등암 Pipe 1본	P11 차량지주 보도구간 협소로 지주 분리설치
		신호케이블 신설 802m	신호케이블 신설 1157m	설계시 물량 누락
		지주(Ø150~Ø350) 기초설치 및 철거 소형고압 블록포장 0EA 지주(Ø150~Ø350) 기초설치 및 철거 블록포장 9EA	지주(Ø150~Ø350) 기초설치 및 철거 블록포장 9EA 지주(Ø150~Ø350) 기초설치 및 철거 스톤블록 포장 8EA	원인자 굴착복구허가에 따른 지주 기초, 철거의 복구 물량 반영
		교통정리요원(지주교체)삼거리 1인 교통정리요원(제어기교체)삼거리 1인 교통정리요원(지주,기초앙카) 4개소	교통정리요원(지주교체)단일로 2인 교통정리요원(지주교체)삼거리 1인 교통정리요원(제어기교체)단일로 2인 교통정리요원(제어기교체) 삼거리 1인 교통정리요원(지주,기초앙카) 6개소	연등구간 등에 따른 교통정리요원을 현장여건에 맞게 배치 및 물량 반영
		가로등암(보안등용) 이설 0본	가로등암(보안등용) 이설 2본	신호지주에 설치된 보안등(투광등) 이설 물량 반영
2	우신초교 앞	제어기 교체 1대	- 제어기 재설치 1대	제어기 연식(2014.07)이 오래되지 않아 교체가 불필요	** ******
		- 음향신호기 신설 3대	- 음향신호기 신설 4대	음향신호기 고장에 따른 설치 물량 반영
		- P13 Ø200지주 철거 1본 - P14 Ø150지주 철거 0본	- P13 Ø200지주 철거 0본 - P14 Ø150지주 철거 1본	지장물(맨홀)로 인한 철거 위치 변경
		P5,P14 지주부착대 13m 신설 2본	P5,P14 지주부착대 11m 신설 2본	현장상황에 맞게 변경 반영
		신호케이블 지중1선 재설치 70m	신호케이블 지중1선 재설치 115m	연등구간 설계 누락으로 현장여건에 맞게 물량 반영
		교통정리요원(제어기이설) 단일로 0인 교통정리요원(제어기이설) 사거리 0인 교통정리요원(지주,기초앙카) 0개소	교통정리요원(제어기이설) 단일로 2인 교통정리요원(제어기이설) 사거리 1인 교통정리요원(지주,기초앙카) 3개소	설계 누락에 따른 교통정리요원 현장상황에 맞게 반영
연번	위치 (TGIS명)	변경전	변경후	변경사유	증·감 금액 (천원)
3	은천로 입구	- 음향신호기 신설 0대	- 음향신호기 신설 2대	음향신호기 고장에 따른 설치 물량 반영	** ******
4	LG전자	- 음향신호기 신설 0대	- 음향신호기 신설 2대	음향신호기 고장에 따른 설치 물량 반영	** ****
		신호케이블 지중4선 재설치 15m - 전원선 지중1선 재설치 15m	신호케이블 지중4선 재설치 5m - 전원선 지중1선 재설치 5m	물량 과다 설계
5	고속 터미널	- 제어기 부분품(LSU) 0EA	- 제어기 부분품(LSU) 1EA	현장여건에 맞게 제어기 부분품 물량 반영	** ****
		신호지주(Ø250) 철거 0본 지주부착대 11m 철거 0본	신호지주(Ø250) 철거 1본 지주부착대 11m 철거 1본	설계물량 누락에 지주 철거 물량 반영
		지주기초(Ø150) 신설 1EA	지주기초(Ø150) 신설 0EA	P5 보행지주 기초 설치 위치가 협소하고, 위치 변경이 어려워 기초 재사용
		신호케이블 신설 168m	신호케이블 신설 209m	설계시 물량 누락
		- 교통정리요원(제어기교체) 사거리 0인 - 교통정리요원(지주,기초앙카) 0개소	- 교통정리요원(제어기교체) 사거리 1인 - 교통정리요원(지주,기초앙카) 3개소	설계 누락에 따른 교통정리요원 현장상황에 맞게 배치 및 반영
6	충무교	제어기 부분품(LSU) 2EA 제어기 부분품(Flash) 0EA	제어기 부분품(LSU) 7EA 제어기 부분품(Flash) 1EA	연등구간 설계누락에 따른 제어기 부분품 변경 반영	** ******
		차량등(1면4색) 설치 6조 차량등(1면3색) 설치 2조	차량등(1면4색) 설치 8조 차량등(1면3색) 설치 1조	설계시 물량 누락 및 과다
		차량지주(Ø300) 신설 1본 차량지주(Ø250) 신설 1본 지주기초(Ø300) 신설 1EA	차량지주(Ø300) 신설 0본 차량지주(Ø250) 신설 2본 지주기초(Ø300) 신설 0EA	P2 차량지주 위치가지장물 (한전 전주) 및 위치변경이 불가능 하여 Ø250지주 변경 및 기초 재사용
		신호케이블 신설 527m	신호케이블 신설 496m	물량 과다 설계
		가로등암(보안등용) 이설 0EA 가로등암(2등용) 이설 0EA 가로등주 기초제거 0EA 가로등암 Pipe 0본	가로등암(보안등용) 이설 1EA 가로등암(2등용) 이설 1EA 가로등주 기초제거 1EA 가로등암 Pipe 1본	P8 가로등 통합지주 변경 설치에 따른 물량 변경 반영
7	구로 디지털단지 입구	제어기 부분품(LSU) 0EA D/B입력 및 현장과 센터시험 0식	제어기 부분품(LSU) 2EA D/B입력 및 현장과 센터시험 1식	D/B 변경에 따른 제어기 부분품 및 D/B입력 변경 반영	** ******
		- 음향신호기 신설 4대	- 음향신호기 신설 3대	현장상황에 맞게 음향신호기 설치 변경 반영
		신호케이블 지중4선 재설치 42m - 전선관 배관(PE Ø100㎜ 1열) 13m - 전선관 배관(PE Ø100㎜ 2열) 18m - 소형고압블럭 굴착배관 13m - 스톤블록 굴착배관 18m	신호케이블 지중4선 재설치 0m - 전선관 배관(PE Ø100㎜ 1열) 0m - 전선관 배관(PE Ø100㎜ 2열) 0m - 소형고압블럭 굴착배관 0m - 스톤블록 굴착배관 0m	기존 배관 재사용 가능하여 굴착 물량 및 신호케이블 재설치 물량 변경 반영
		아스팔트 포장복구 0㎡	아스팔트 포장복구 18㎡	아스팔트 원인자복구허가에 따른 굴착 복구 물량 반영

※ 이외 세부 내역은 실정보고서(설계내역서) 참고.

□ 설계변경금액(예상)                                (단위:원)

구 분		당 초	변 경	증·감
도급비	공급가액	************	************	***********
	부가가치세	***********	***********	**********
	합 계	***********	************	************

□ 책임감리원 기술검토 의견

○ 현장상황과 상이한 부분을 현장여건에 맞게 변경하여 시공하는 것이 필요함.

※ 책임감리업체 실정보고 태영(신)2019-181(2019. 11. 20.)

Ⅲ
		보 고 자 의 견

□ 책임감리원 실정보고에 대한 검토 결과

○ 지중배관 재사용, 음향신호기 고장부위 신설 및 누락된 제어기 부분품 설치 등 현장여건에 맞게 작업물량을 변경한 사항으로

○ 책임감리원 실정보고는 적정함으로 실정보고에 대해 승인통보 하고자 함.

붙 임 : 1. 책임감리원 실정보고서 1부.
2. 설계변경내역서 1부  끝.