문서번호	정수시설과-11159
결재일자	2019.11.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
박진이		代양묘식	11/21 가길현
협조
	주무관		이승우

"태양광 발전장치 조달구매 및 전기공사" 납품·준공기한 연기 검토 보고

｢태양광 발전장치 조달구매 및 전기공사｣

납품·준공기한 연기 검토 보고

2019. 11.

영등포아리수정수센터

(정 수 시 설 과)

｢태양광발전장치 조달구매 및 전기공사｣

납품·준공기한 연기 검토 보고

접속반 화재로부터 보호강화를 위해 KS인증 접속반으로 교체되어 KS인증 접속반 납품일정에 맞춰 관급자재 납품기한 및 전기공사 계약기간을 연기해야 할 사유가 발생하여 보고 드림.

▢ 계약현황

○ 태양광 발전장치

건 명	품명 (물품식별번호)	물품대(원)	조달수수료(원)	계약업체	납품기한
태양광발전장치조달구매	태양광발전장치 (23259847)	105,000,000	567,000	㈜풍성인더스	’19.11.30.
	태양광발전장치 (23259846)	104,000,000	561,600
	태양광발전장치 (23259769)	85,000,000	459,000
	태양광발전장치 (23259713)	69,000,000	372,600
	태양광발전장치 (23259710)	62,232,000	336,053
	태양광발전장치 (23259701)	44,000,000	237,600

○ 전기공사

건 명	계약업체	계약금액(원)	납품기한
태양광발전설비 설치 전기공사	㈜로터스전력	43,672,580	’19.11.28.

▢ 보고내용

○ 당해까지는 KS인증 접속반 사용이 권고사항이지만, 내년부터는 KS인증 접속반 사용이 의무 사항으로 바뀌는 바, 화재로부터 보호강화를 위해 우리센터는 올해부터 KS인증 접속반을 사용하는 것이 적절하다고 협의

○ KS인증 접속반 납품일정 확인 결과, 구매발주 후 제조까지 최대 30일, 제조 후 자가화재진압장치 탑재까지 최대 10일 정도 소요될 예정으로 납품기한 연기가 불가피함

○ 접속반 설치가 지연됨에 따라, 전기공사 준공기한도 함께 연기가 필요함

▢ 변경내용

○ 납품기한 및 준공기한 연기내용

건 명	연기사유	납품기한 · 준공기한		업체명
		당초	변경
태양광발전장치 조달구매	KS인증 접속반 사용으로 납품 지연	’19.11.30.	’19.12.23.	㈜풍성인더스
태양광발전설비 설치 전기공사	태양광 납품기한에 맞춰 함께 연기	’19.11.28.	’19.12.23.	㈜로터스전력

○ 귀책사유 : 영등포아리수정수센터

○ 지체상금 : 미부과

▢ 처리의견

○ KS인증 접속반 구매 발주 후 납품기한에 맞춰 설치 및 전기공사 진행

붙 임 : 1. 납품기한 연기 요청 1부.

2. 납품기한 연기 요청건에 대한 감리검토의견서 1부.  끝.