등록번호	도로시설과-12977		주무관		보도관리팀장		도로시설과장		생활도시친화국장
등록일자	2019.11.20.
			박성범		박흥규		신대식		11/21 정택근
결재일자	2019.11.21.
공개구분	대시민공개
			협 조
『2019년 보도유지보수공사(연간단가, 시민참여)』 설계변경(2차) 검토 보고
생활도시친화국 도로시설과

『2019년 보도유지보수공사(연간단가, 시민참여)』

설계변경(2차) 검토 보고

『2019년 보도유지보수공사(연간단가, 시민참여)』관련, 시 [재]배정 예산 및 명동주민센터 공사의뢰에 따라 시공물량 증·감이 발생하여 이에 따른 설계변경을 시행코자 함.

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 2019년 보도유지보수공사(연단간가, 시민참여)

□ 도 급 자 : 두광건설(주) 대표 권재섭

□ 공사기간 : 2019.03.14. ~ 2019.12.20.

□ 공사개요 : 블록포장 40.1a, 화강석 포장 8.9a, 측구보수 4,018m

□ 사 업 비

총공사비	도급비	관급비	이전비 및 기타	비 고
1,640,000,000	1,087,000,000	353,000,000	200,000,000

Ⅱ		예산현황

(단위 : 원)

예산과목	예산액	집행가능액	비 고
계	2,029,817,000	1,974,749,000
보도유지보수공사	450,000,000	441,001,000	구비
평탄성 불량보도 및보도턱 집중정비	200,000,000	181,247,000	구비
걷기편한행복거리만들기	805,000,000	777,684,000	시비
도로 안전시설 설치및 정비	30,000,000	30,000,000	시비
도시비우기 사업	352,000,000	352,000,000	시비
노후포장도로 정비공사	92,817,000	92,817,000	시비
장애인 점자블럭 정비사업	100,000,000	100,000,000	구비

Ⅲ		관련근거

□ 市 재배정 보도유지관리 예산 집행계획 【도로시설과-12414(‘19.11.8)】

- 무교로 일대 노후측구 정비계획

□ 명동주민센터 공사의뢰에 따른 예산 집행계획 【도로시설과-10281(‘19.9.17)】

- 소공로6나길 보행환경 개선공사 시행계획

□ 낙찰차액 활용 집행계획 【도로시설과-12753(‘19.11.15)】

- 「도로 및 조명 정비사업」 주민요구 및 추가공사 사항 조치 계획

Ⅳ		보고내용

□ 설계변경 사유

- 市 재배정 예산에 따른 시공물량 증가

- 명동주민센터 공사의뢰 및 다산로 도시비우기 사업 집행잔액 활용 물량 반영

- 낙찰차액 활용에 따른 시공물량 증가

□ 공사금액 변경

(단위 : 원)

구 분	당초금액	변경금액	증·감액		비고
			증	감
총공사비	1,640,000,000	1,974,700,000	334,700,000	-
도 급 비	1,087,000,000	1,690,500,000	603,500,000	-
관 급 비	353,000,000	234,200,000		118,800,000
이 전 비	200,000,000	50,000,000	-	150,000,000

□ 공사규모 변경

구 분	블록 포장	화강석 포장	측구보수	비 고
당 초	40.1a	8.9a	4,081m
변 경	85.7a	7.8a	9,439m

□ 주요 공사물량 증·감

공 종	규격	단위	물량변경			비 고
			당초	변경	증·감
기계상차 (아스팔트, 콘크리트)	BH 0.7㎥, 주간	㎡	627	760.2	증) 143.2
측구표면보수 (평삭, 포장)	초속경, t=5~7㎝, 야간	m	2,009	3,670	증) 1,661
측구표면보수 (평삭,포장)용 거더		m	2,009	3,670	증) 1,661
보차도경계석 (시공량80m)	20*25*100㎝	m	587	900	증) 313
투수기층공(보도)	인력, T=10㎝, 야간	a	17.46	40.76	증) 23.36
보도블록 포장	2.5a/일 기준, 야간	a	40.07	61.97	증) 21.9
가로수분 설치 및 철거	야간	개	203	272	증) 69
아스팔트평삭 (소규모)	5a 이하	a	1.32	4.24	증) 2.92
보행안전도우미	작업구간 30m이하. 야간	일	141	226	증) 85
교통정리원	모범운전자회, 야간	일	404	729	증) 325

Ⅲ		조치계획

□ 市 재배정 예산 및 낙찰차액 활용에 따른 시공물량 증·감을 반영하여

설계변경을 시행하고 추후 정산 처리코자 합니다.

Ⅳ		행정사항

□ 계약심사 및 일상감사 의뢰 (도로시설과 ⇒ 감사담당관)

□ 설계변경 시행 (11월중)

붙임  1) 관련문서 3부.

2) 설계변경내역서 1부.

3) 검증확인서 1부.  끝.