＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	남부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	준공기한 연기에 따른 변경계약 의뢰(양평동4가323~당산동5가32-1번지외 3개소 송배수관정비공사)

1. 우리사업소에서 시행중인************************************에 대하여 아래와 같이 준공기한을 연기 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : **********************************

나. 계약업체 : ************

다. 계약금액 : ***************

라. 준공기한 연기

- 당 초 : 2019.5.20.~ 2019.11.23.

- 변 경 : 2019.5.20.~ 2020. 5.30.

마. 귀책소재 : 발주청(남부수도사업소)

바. 지체상금 부과여부 : 미부과

사. 연기사유 : 관급자재 수급지연 및 우천으로 인한 절대공기 부족

붙임 : 1. 준공기한 연기 보고서 1부.

2. 관련 문서 각 1부.

3. 변경합의서 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	강판오		시설운영팀장	권승계		시설관리과장	11/21 고신석
협조자
시행	시설관리과-24412	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-4592	/전송	02-3146-4639	/	kpo8585@seoul.go.kr	/	부분공개(7)