투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	관리과장
(경유)
제 목	『슬러지야적장 옹벽설치공사』 설계변경 시행 및 변경계약 의뢰

시설보수과-6390(2019. 11. 21.)호에 따라 우리 센터에서 시행 중인 『슬러지야적장 옹벽설치공사』에  대하여 다음과 같이 설계변경 및 변경계약을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 슬러지 야적장 옹벽설치공사

나. 도 급 자 : ㈜벽산엔터프라이즈  대표 김동운

다. 공사기간 : 2019. 9. 16. ~ 2019. 12. 30.

라. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분		당초 계약금액	변경 계약금액	증ㆍ감	비 고
총공사비		174,097,000	172,260,000	감) 1,837,000
도급비	공급가액	158,270,000	156,600,000	감) 1,670,000
	부가가치세	15,827,000	15,660,000	감) 167,000
	계	174,097,000	172,260,000	감) 1,837,000

마. 설계변경 사유 : 공사완료에 따른 시공물량 변동(증) 발생

바. 예산과목 : 중랑물재생센터 공통분야 유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비, 수선유지비

붙임  1. 방침서 1부.

2. 설계변경 사유서 1부.

3. 설계변경 내역서 및 수량산출서 1부.

4. 합의서 1부.  끝.

	시설보수과장
주무관	송진수		주무관	조연상		시설보수과장	11/21 임준빈
협조자
시행	시설보수과-6398	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 중랑물재생센터	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2211-2545	/전송	02-2211-2579	/	jinsoo@seoul.go.kr	/	대시민공개