급수공사 공사기한 연기 보고

주무관		시설운영팀장	시설관리과장			결재
박준기		권승계	11/22 고신석
협 조

명에 의하여 2019년 사당1동외 14개동 상수도공사 감독업무 수행 중 공사기한 연기 사유가 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

2019. 11. 22.

직 지방시설주사보 박준기

1. 공사기한 연기 및 작업지시 변경 대상

연번	위치	수요가	공사기간	작업지시번호	공사 개요	시공업체
1	***********	***	2019.11.12.~ 2019.11.22.	개량-156	D=15m 계량기설치	주산건설㈜
2	***************	***	2019.11.12.~ 2019.11.21.	신설-151	D=40mm, L=4m	주산건설㈜

2. 공사기한 연기 및 작업지시 변경 사유

- 수요가측과 공사일정 협의 및 현장 공사준비 미흡(동바리 미철거, 자재적치)등의 사유로 공사 연기

3. 처리의견

상기 공사에 대하여 아래와 같이 공사기한을 변경하여 급수공사에 만전을 기하고자 합니다.

연번	위치	당초 공사기간	변경 공사기간	비 고
1	***********	2019.11.12.~2019.11.22.	2019.11.12.~2019.12.6.	급수공사 연기 시행
2	***************	2019.11.12.~2019.11.21	2019.11.12.~2019.12.6.	급수공사 연기 시행

붙임 : 공사 연기원 3부.  끝.