- 중구민을 위한 도시 -
		서울특별시 중구
수신	내부결재
(경유)
제목	2019년 차도유지보수공사(연간단가) 설계변경 시행(2회)

우리구에서 시행중인 『2019년 차도유지보수공사(연간단가)』에 대하여 아래와 같이 설계   변경 시행(2회)코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2019년 차도유지보수공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2019. 3. 13. ~ 2019. 12. 31.

다. 도 급 자 : 거야건설(주) 권순상

라. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
총 공 사 비	697,391,530	1,205,000,000	증) 507,608,470
도 급 비	470,391,530	881,430,000	증) 411,038,470
관 급 비	181,000,000	269,431,190	증) 88,431,190
이 전 비	46,000,000	54,138,810	증) 8,138,810

마. 설계변경 사유

- 시공물량 증·감에 따른 설계변경

바. 예산과목                                                  (단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	예산액	비고
도시기반 시설확충	도로유지 관리	차도유지보수공사	시설비 및 부대비	시설비	750,000
		아이들이 편안한 골목길 만들기(구 주민참여)			70,000
		안전도로 행복쪽방 (구 주민참여)			60,000
		도로포장 및 정비 (시민참여)			175,000
		중앙시장(돈부산물거리) 도로정비(추경)			150,000

첨 부 : 1) 설계변경 내역서(2회) 1부.

2) 제비율 검증확인서 1부.

3) 설계변경 검토보고서 1부.

4) 일상감사 및 계약심사 처리 결과 1부. 끝.

주무관							김학준			도로관리팀장					이성하					도로시설과장					신대식				생활도시친화국장						11/22 정택근
협조자				주무관						한희주					계약팀장							최영순					재무과장							박수돈
시행			도로시설과-13092									(	2019.11.22					)		접수											(						)
우	04558					서울특별시 중구 창경궁로 17 (예관동)															/			http://www.junggu.seoul.kr
전화		3396-6112						/전송			02-3396-8839					/	hjk3210@junggu.seoul.kr												/	대시민공개