＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	영등포아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	준공기한 연기에 따른 변경계약 시행(태양광발전설비 설치 전기공사)

1. 정수시설과-11159(2019.11.21.)호와 관련입니다.

2. 우리센터에서 진행중인 □영등포아리수정수센터 태양광발전시설 설치□ 전기공사에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기에 따른 변경계약을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 영등포아리수정수센터 태양광발전시설 설치 전기공사

나. 계약업체 : 주식회사 로터스전력 대표 전우식

다. 계약금액 : 금43,672,580원(금사천삼백육십칠만이천오백팔십원)

라. 준공기한 연기 내역

※ 계약금액 변경 없음

건 명	당 초	변 경	비 고
태양광발전시설 설치 전기공사	2019.11.28.	2019.12.23.	증) 25일

마. 귀책소재 : 영등포아리수정수센터

바. 지체상금 부과여부 : 미부과

사. 연기사유 : 태양광발전장치 납품기한 연기에 따라 전기공사 연기

붙 임 : 1. 보고서 1부.

2. 납품연기 요청 공문 및 감리검토의견서 각1부.

3. 합의서 1부.

4. 법률검토서(계약연장근거) 1부.  끝.

주무관	박진이		정수시설과장	代양묘식		영등포아리수정수센터소장	11/22 가길현
협조자
시행	정수시설과-11223	(		)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11 영등포아리수정수센터 행정관리과	/
전화	02-3146-5626	/전송	02-3146-5697	/	pjy4444@seoul.go.kr	/	부분공개(5)