문서번호	설비부-18785
결재일자	2019.11.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	환경설비과장	설비부장
손영화	김오열	11/25 임정규

『천호대로(광나루역) 확장 전기공사』

설계 변경(총차 8회, 7차 4회) 준공(정산) 검토  보고

2019.11.

도시기반시설본부

( 설 비 부 )

『천호대로(광나루역) 확장 전기공사』

설계 변경(총차 8회, 금회 7차 4회) 준공(정산)검토 보고

본 공사관련하여 운영부서 요구사항(감시모니터 재배치, CCTV 신설 외) 등을 반영한 설계변경 및 준공정산(안전관리비 등 제경비 정산, ESC 정산)에 대해 검토 후 변경계약 요청하고자 보고드림.

⇨ 당초:1,613,387천원 , 변경:1,589,007천원 (감24,380천원)

Ⅰ		공 사 개 요

❑ 공 사 명: 천호대로(광나루역)확장 전기공사

❑ 위    치: 광진구 구의동 58-15 ~ 광장동 388-10(아차산역~광나루역)

❑ 규    모: 지하차도 조명 및 환기설비, 상부공원 조명 및 수경시설 외

❑ 공사기간: 2011. 6. 16. ~ 2019. 11. 30.

(7차: 2017. 9. 5. ~ 2019. 11. 30.)

❑ 도 급 비: 1,613,387천원(7차 896,307천원)

❑ 시 공 사: ㈜거성전설 대표 공병준

❑ 건설사업관리단: ㈜수성엔지니어링 대표 박미례

Ⅱ		관련근거

❑ 설계변경 및 (총차8회,7차4회) 준공(정산) 검토 보고

( 천호수 제2019-230호, 2019.11.25.)

❑ 천호대로(광나루역) 확장 전기공사 전기시설물 보완 요구사항 검토보고(설비부-16778호, 2019.10.29.)

Ⅲ		검토내용

❑ 설계변경 금액                                                               (단위 : 천원)

구 분		전체(총차8회)			금회(7차4회)
		당 초	변 경	증 감	당 초	변 경	증 감
순공사비	재료비	431,536	452,406	증 20,871	282,596	303,467	증 20,871
	노무비	580,950	590,626	증 9,675	252,517	262,192	증 9,675
	경비	158,729	124,885	감 33,844	99,883	66,039	감 33,844
일반관리비		49,191	49,053	감 138	26,670	26,532	감 138
이윤		113,740	110,213	감 3,527	48,961	45,434	감 3,527
설계비 등		11,160	11,880	증 720	2,160	2,880	증 720
ESC		121,410	105,489	감 15,921	102,038	86,117	감 15,921
공급가액		1,466,716	1,444,552	감 22,164	814,825	792,661	감 22,164
부가세		146,671	144,455	감 2,216	81,482	79,266	감 2,216
합 계		1,613,387	1,589,007	감 24,380	896,307	871,927	감 24,380

❑ 설계변경 사유

구 분	설 계 변 경 사 유	비 고
직접공사비	- 운영부서 요구사항 반영 ․ 성동도로사업소 기전과-4457호(‘19.9.4.): 감시모니터 재배치 외 ․ 광진구 공원녹지과-13901호(‘19.9.19.) : CCTV 2개소 신설 - 상징조형물 관리동 신설에 따른 전기인입 반영 - 야외무대설치에 따른 지중매입등 철거 반영 등	증29,632천원
제경비정산	보험료 및 안전관리비 정산 반영	감36,397천원
ESC 정산	물가변동 조정금액 정산 반영	감15,920천원

❑ 설계변경 주요내용

(단위 : 천원)

공 종	내 용	공사비 증감
수배전 공사	- 운영부서(성동도로사업소) ․ 옥외변전실 책상,소화기 비치 외	증 1,349
기타 부대공사	- 민원사항(가로등주 2본 이설) 반영 및 설계 오류로 인한 UTP케이블(2,400m) 미시공 물량 감	감 6,186
경관개선공사 - 경관등 설비공사	- 상부공원 야외무대 설치로 인한 지중매입등 철거(8개소)분 반영	증 674
CCTV 및 비상벨 설치공사	- 운영부서 요구사항 반영 ․ 성동도로사업소 – 감시모니터 재배치 외 ․ 광진구 공원녹지과 – CCTV 신설(2개소)	증 29,909
상징조형물	관리동 신설에 따른 전기인입 등 반영	증 3,886
소 계		증 29,632

❑ 물가변동 조정 금액(총 ESC 6회, 합계 105,489,089원) 정산

(단위 : 천원)

구 분	지수조정율	당초금액(원)	정산금액(원)	증·감액	비 고
1회	3.82%	28,409,090	26,792,562	감 1,616,528
2회	3.36%	17,129,090	16,440,207	감 688,883
3회	3.38%	17,900,909	16,951,474	감 949,435
4회	3.78%	22,801,818	21,584,273	감 1,217,545
5회	3.49%	22,024,545	11,495,800	감 10,528,745
6회	3.53%	13,144,545	12,224,773	감 919,772
합 계		121,409,997	105,489,089	감 15,920,908

❑ 제경비 정산(보험료 및 안전관리비)

(단위 : 천원)

구 분	금 액(원)			비 고
	당 초	변 경	증·감액
건강보험료	8,817,990	-	감 8,817,990
연금보험료	12,915,762	-	감 12,915,762
퇴직공제부금비	11,930,222	-	감 11,930,222
노인장기요양보험료	577,578	-	감 577,578
산업안전보건관리비	24,592,039	22,436,000	감 2,156,039
계	58,833,591	22,436,000	감 36,397,591

Ⅳ		건설사업관리기술자 검토의견

❑ 천호대로(광나루역)확장 전기공사와 관련하여 운영부서 요구사항(감시모니터 재배치,CCTV추가설치) 등을 반영한 설계변경 내용이 적정하며, 제경비(보험료,안전관리비 외) 정산 및 물가변동에 의한 계약금액 조정 금액이 적정하게 반영되었음.

Ⅴ		보고자 의견

❑ 건설사업관리단 보고사항을 검토한 결과 설계변경 및 준공정산(보험료 등 제경비 정산, ESC정산) 내용이 적합하다고 판단되어 이를 총무부에 변경 계약 의뢰 하고자 함.

붙임  1. 관련공문(설계변경내역서 포함)  1부.

2. 검증 확인서 1부.   끝.