＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	2020년 내용연수경과 취약관로(배급수관)정비사업 대상선정 및 심사계획 알림

1. 2020년도 『내용연수경과 취약관로(배급수관)정비사업』계획(안)을 아래와 같이 알려드리오니 사업대상을 선정하여 2019. 12. 9.(월)까지 제출(급수운영과 수합)하여 주시기 바라며,

2. 제출된 배급수관 정비사업은 심사를 거쳐 2020년도 사업으로 확정할 예정이오니 사업 우선순위 기준에 따라 대상 선정에 철저를 기하여 주기기 바랍니다.

가. 내용연수경과 취약관로(배급수관 350㎜ 이하)정비 계획

1) 연차별 정비계획

구분	계	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
정비연장 (㎞)	342	25	80	80	80	77

2) 사업소별 정비계획

(단위 : ㎞ / 천원)

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
정비목표	25	3.8	4.4	5.5	2.0	2.0	2.0	3.3	2.0
사 업 비	25,285	3,785	4,500	5,600	2,000	2,000	2,000	3,400	2,000

※ 시의회 예산 심의시 증․감 변경될 수 있음.

3) 정비대상 :‘84 ~ 85년 매설 덕타일주철관관(시멘트라이닝), 덕타일주철관(무라이닝관)

○ 우선순위 선정 기준

- 1순위 : 녹물 및 이물질 출수 등 민원발생 구간

- 2순위 : 누수 다발구간

- 3순위 : 서울형 도시재생활성화 지역(위치도 별첨)

○ 사업계획서 작성방법 및 단위사업카드 작성 : “별첨”

나. 사업계획 심사일정

구 분	12.11 (수)		12.12 (목)		12.13 (금)		12.16 (월)
	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00
사업소	북부	강남	강서	중부	남부	서부	강동	동부

※ 단위사업카드는 심사당일 제출

붙 임 : 1. 내용연수경과 상수도관 정비계획(본부장방침)1부

2. 2020년 단위사업계획 도면 작성방법  1부.

3. 2020년 배급수관 정비사업 추진계획서(보고양식) 1부.

4. 2020년 배급수관 정비사업 단위사업 카드 1부.

5. 84,85 관로 내역 및 무라이닝관 내역

6. 도시재생 활성화지역 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	서상급시(1-8)
주무관	한현숙		누수방지과장	이용구		시설안전부장	11/25 代이용구
협조자
시행	누수방지과-12745	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1522	/전송	02-3146-1529	/	hs323@seoul.go.kr	/	부분공개(5)