문서번호	설비부-18736
결재일자	2019.11.25.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
박도원		代마동훈	11/25 임정규
협조

『남산예장자락 재생사업 기계설비공사』

공사기간(총차, 2차) 연장 검토보고

2019. 11.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『남산예장자락 재생사업 기계설비공사』

공사기간(총차, 2차) 연장 검토보고

우리 본부에서 추진 중인『남산예장자락 재생사업 기계설비공사』관련하여 선행공종 공사기간 연장에 따른 설비공사 공기연장 조치내용을 검토보고 드림.

1		공 사 개 요

○ 공 사 명: 남산예장자락 재생 기계설비공사

○ 공사규모: 공원 15,154㎡, 주차장 10,015㎡(버스 39대, 장애인 2대)

○ 용    도: 자동차관련시설(주차장 및 부대시설)

○ 공사기간: 2017. 09. 01. ~ 2019. 12. 31.

○ 공사금액: **************************************

○ 시 공 사: ㈜지정이앤씨 외 4개사

○ 책임건설사업관리단: ㈜동성엔지니어링 외 2개사

2		관 련 근 거

○ 준공기한 연기 및 사업계획 변경 검토보고(방재시설부-14911, ‘19.10.08.)

- 준공기한 연기: (당초) 2019.12.31., (변경) 2020.12.31.

○ 공사기간 변경 요청(남산예장 감리 제2019-527, ‘19.11.25.)

3		검 토 내 용

○ 기계설비공사 공사기한 연기

차수	계약금액	공사기한		비 고
		당 초	변 경
총차	*************	‘17.09.01.~ ‘19.12.31.	‘17.09.01.~ ‘20.12.31.	계약금액 변동없음
2차	*************	‘19.11.20.~ ‘19.12.31.	‘19.11.20.~ ‘20.12.31.

(단위 : 원)

- 연기사유: 선행공종(건축･토목) 준공기한에 맞추어 기계설비공사 준공기한 연장

- 귀책소재: 서울특별시 도시기반시설본부

- 지체상금 부과여부: 미부과

○ 건설사업관리단 검토의견

- 선행공종(건축 및 토목)의 공사기간 연장(‘20.12.31.)에 맞춰 기계설비공사 공사기간을 변경함이 적정하다고 판단됨.

4		보고자 의견

○ 선행공종(건축･토목) 연장 공사기간에 맞추어 기계설비공사 준공기한(총차, 2차)을 연장함이 적정한 것으로 판단되므로 계약부서에 공사기간 연장을 의뢰하고자 함.

붙임  1. 방재시설부 준공기한 연기 공문 1부.

2. 건설사업관리단 공기연장 공문 1부.  끝.