문서번호	설비부-18732
결재일자	2019.11.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
최대진		여인웅	11/25 임정규
협조
	주무관		김현욱

『탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 기계·전기·통신공사』

예비 준공검사(1차분) 시행 계획 보고

2019. 11.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 기계·전기·통신공사』

예비 준공검사(1차분) 시행 계획 보고

『탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 기계·전기·통신공사』의 준공기한(‘19.12.31)이 도래함에 따라 준공전 예비 준공검사 실시계획에 대해 검토 보고 드림

Ⅰ		공 사 개 요

구 분	기 계	전 기	통 신	비고
공 사 명	탄천 총인처리시설 기계공사	탄천 총인처리시설 전기공사	탄천 총인처리시설 통신공사
공사위치	강남구 개포로 625 일원	강남구 개포로 625 일원	강남구 개포로 625 일원
공사규모	2개소 Q=450,000㎥/일	2개소 Q=450,000㎥/일	2개소 Q=450,000㎥/일
공사기간	총차 ′17. 12. 04 ~ ′20. 02.. 03 1차 ′17. 12. 04 ~ ′19. 12. 31	총차 ′17. 11. 30 ~ ′20. 03. 31 1차 ′17. 11. 30 ~ ′19. 12. 20	총차 ′17. 11. 23 ~ ′20. 03. 31 1차 ′17. 11. 23 ~ ′19. 12. 20
계약금액	총차 1,837,280,000원 1차 900,000,000원	총차 2,113,748,000원 1차 887,659,000원	총차 124,229,671원 1차 48,961,000원
계 약 자	㈜이수에이치앤씨 외 2	㈜부경일레콤 외 2	㈜한일이앤에스
감 리 자	㈜선진엔지니어링 외 3	㈜선진엔지니어링 외 3	㈜선진엔지니어링 외 3

Ⅱ		관 련 근 거

건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침(준공검사 등 절차)

○ 소속직원 중 2인 이상의 검사자 임명, 유지관리기관 입회 등

전기공사(1차분) 예비준공검사 요청(탄천하감-367호, 2019.11.20)

통신공사(1차분) 예비준공검사 요청(탄천하감-368호, 2019.11.20)

기계공사(1차분) 예비준공검사 요청(탄천하감, 2019.11.25)

Ⅲ		예비준공검사 계획

예비준공검사 일정

○ 일 시 : 2019. 11. 26(화) 14:00 ~ 18:00

○ 장 소 : 탄천물재생센터 3차총인처리시설 공사 현장

예비준공검사

○ 점검자 : 도시기반시설본부 설비부 최대진, 김도형(기계분야)

도시기반시설본부 설비부 김현욱, 이창근(전기·통신분야)

○ 입회자 : 건설사업관리기술자(책임1, 기계1, 전기1, 통신1) 4명

현장대인리(기계1, 전기1, 통신1) 3명

주요 점검내용

○ 공사 내용중 미비한 사항의 사전 보완

○ 공사 품질확보 및 하자 발생방지를 위한 사전점검

○ 인계·인수 관련 사전 보완사항 점검

○ 정산 설계도서에 의거 준공검사에 준하여 시행

예비준공검사 조치계획

○ 예비준공검사 실시결과 지적사항은 건설사업관기술자에게 보완지시

○ 지적사항 보완 후 책임건설사업관리기술자의 확인 후 준공검사원 제출

Ⅳ		조 치 계 획

2019. 12. 31한 : 준공검사(1차) 및 준공처리 및 2차수 계약

붙임 ： 1. 건설사업관리단 공문 각(별도첨부) 1부.

2. 예비준공검사조서(양식) 1부.  끝.