문서번호	급수운영과-20905
결재일자	2019.11.25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
김원재		김승완	11/25 代김찬모
협조
	주무관		김준영

단수계획 보고

(아현2구역 주택재개발 정비사업)

2019. 11.

서부수도사업소

(급수운영과)

“아현2구역 주택재개발 정비사업 조합”에서 시행는 상수도관 이설공사와 관련하여 단수계획을 아래와 같이 보고 드림.

□ 공사현황

❍ 공 사 명 : 아현2구역 주택재개발 정비사업 중 상수도 이설공사

❍ 공사개요 : D=200㎜, L=63m

❍ 공사위치 : *******************************

❍ 공사일시 : 2019. 11. 26.(화) ~ 11.27.(수)

□ 수계현황

❍ 급수수계 : 노고산배수지(가압)

❍ 급 수 량 : 7,114 ㎥/일

❍ 표    고 : 85m

❍ 급수계통도

뚝도정수센터	⇨	노고산배수지 (가압)	⇨	와우산2중블록

□ 단수 추진계획

❍ 단수지역 : ******************

❍ 단수세대 : 4가구

❍ 관로제원 : D=80㎜(CIP, 1980)

❍ 수    압 : 3.3 kg/㎠

❍ 단수일시 : 2019. 11. 26.(화) ~11.27.(수) 10:00~17:00 중 4시간

❍ 작업(단수) 시간 산출 : 4시간(1일 기준)

- 제수변개폐(30분) + 관 절단(30분) + 배관 접합(120분) + 퇴수 및 통수(60분)

❍ 제수밸브 조절 및 퇴수 계획

- 관 내부 유속 변화에 따른 혼탁수 퇴수를 위하여 계량기 철거 후 충분한 퇴수 시행

- 밸브 개폐시 유속변화가 최소화 되도록 천천히 조절

- 통수 후 주변 수질상태 모니터링

❍ 제수밸브 조절 및 퇴수 위치도

- 제수밸브 조절 : 3개소(200mm 3개소)

❍ 기타사항

- 각 가정에 단수안내문 배포 및 상수도홈페이지 게재

- 공사용 자재 및 장비 사전 점검

- 교통정리원 공사장 전후 배치

- 공사 안내간판 및 라바콘 설치

따로붙임 : 단수작업계획서 1부. 끝.