문서번호	전시과-8747
결재일자	2019.11.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		전시과장	서울시립과학관장
신지혜		代정미숙	11/25 이정모
협조
	★주무관		오태숙

서울시립과학관 천체관측실 구축 공사 낙찰차액 및 집행잔액 사용계획 보고

2019. 11.

서울시립과학관

(전  시  과)

서울시립과학관 천체관측실 구축 공사

낙찰차액 사용계획 보고

본 공사 발주에 따른 낙찰차액을 활용하여 천체관측실 증축 공사 소방감리용역을 시행하여 시민에게 안전하고 쾌적한 관람시설을 제공하고자 사용계획을 보고 드림

□ 관련근거

◯ 지방자치단체 세출예산 집행기준

(안전행정부 예규 제26호, 2012. 11. 29.)

◯ 서울시립과학관 천체관측실 구축 추진 계획

(전시과-6054, 2019.8.14.)

◯ 서울시립과학관 천체관측실 구축공사 계약체결 통보

(재무과-47016, 2019.9.11.)

□ 공사개요

◯ 공 사 명 : 서울시립과학관 천체관측실 구축 공사

◯ 공사기간 : 2019. 09. 09. ~ 2019. 12. 07.

◯ 도 급 비 : 221,872,160원

◯ 공사개요 : 서울시립과학관 메이커스튜디오 상부(45.61m2)상부 천체관측실 구축 및 돔 설치

□ 예산잔액(낙찰차액) 발생현황

◯ 발주 및 예산잔액(낙찰차액)

(단 위: 천 원)

구 분	발주금액	계약금액	예산잔액 (낙찰차액)	비고
천체관측실 증축 공사	254,000	221,872	32,127

※ 예산과목 : 서울시립과학관 총무과, 과학기술 진흥, 전시실 조성 및 운영, 융합과 소통의 신규콘텐츠 개발, 시설비 및 부대비, 시설비 (401-01)

◯ 공사 추진현황

- 2019. 08. 14. : 발주계획 수립

- 2019. 08. 20. : 계약의뢰

- 2019. 09. 09. : 계약체결

□ 낙찰차액 및 집행잔액 사용계획

◯ 「서울시립과학관 천체관측실 공사」소방감리 용역

- 과 업 명 : 서울시립과학관 천체관측실 공사 소방감리 용역

- 기    간 : 2019. 12. 17. 까지

- 과업내용

➀ 소방시설공사업법 제12조 및 제17조에 따른 소방시설공사 착공신고

➁ 소방시설등의 설치계획표의 적법성 검토

➂ 소방시설등 설계도서의 적합성 검토

➃ 완공된 소방시설등의 성능시험 등 소방시설공사업법 제16조(감리)에 따른 감리업무 수행

- 소요예산 : 금1,650,000원 (금일백육십오만원) *VAT포함

※ 산출근거 : 엔니니어린 기술진흥법 제10조 제2호 규정

(엔지니어링 노임단가 적용일 :2019년1월1일)

- 예산과목 : 서울시립과학관 총무과, 과학기술 진흥, 전시실 조성 및 운영, 융합과 소통의 신규콘텐츠 개발, 시설비 및 부대비, 시설비 (401-01)

□ 향후계획

◯ ‘19. 11. 28.            : 소방감리 용역 수의계약 체결

◯ ‘19. 11. 29.            : 착수

◯ ‘19. 11. 29. ~ 12.17. : 과업수행

◯ ‘19. 12. 17. ~         : 준공.  끝.