“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	2019년 한강교량 일상유지보수공사(2공구) 실정보고(26차) 승인통보

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원하오며, 동성한강 2019-422호(2019.11.6.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 실정보고한 제26차 작업지시의 신축이음장치 변경 및 계단보수 등 신규공종 적용에 대하여 아래와 같이 승인통보 하오니 현장관리에 철저를 기하여 주시고,

3. 변경사항에 대하여는 추후 설계변경위원회를 거쳐 반영할 수 있도록 관련 절차 이행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 승인내용

- 신축이음장치 변경 및 계단 보도부포장 신규공종 반영(제26차 작업지시)

※ 관련근거 : 공사계약일반조건 제7절 및 도로공사장 교통관리지침

- 변경내용 : 신축이음장치 변경(WD160 → New F/J150) 및 보도부 포장(MMA) 등 관련공종

나. 승인조건

- 작업조건에 따라 공사시 사전에 공사안내간판 및 안전시설 설치를 확인 후 공사시행

- 시공시 품질관리 및 안전사고 예방 등 관련절차 이행 철저

.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	한강교량보수공사 건설사업관리단장,(주)재강건설 대표 윤재민
주무관	신익현		교량관리팀장	강천수		교량안전과장	11/25 김종호
협조자
시행	교량안전과-19655	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지) 프리미어 플레이스빌딩(9층)	/
전화	02-772-7189	/전송	02-772-7305	/	caram00@seoul.go.kr	/	부분공개(5)