문서번호	시설과-11856
결재일자	2019.11.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	시설안전부장
김기봉		송병욱	11/26 代이용구
협조
	주무관		김형식

「낙산배수지 건설공사」

송수관로구간 사토장변경 실정보고 검토

2019. 11.

상수도사업본부

시설과

「낙산배수지 건설공사」

송수관로구간 사토장변경 실정보고 검토

낙산배수지 송수관로 구간 사토장 변경 관련 건설사업관리인 실정 보고 검토내용을 보고 드림.

사업개요

❍ 규    모 : 배수지 확충 2,300㎥증설 (기존 V=3,300㎥)

송배수관 부설 D=400mm, L=597m

❍ 계약기간 : ’17. 12. 14. ~ ’20. 05. 30 (총차)

’19. 01. 01. ~ ’19. 12. 31 (3차수 진행중)

❍ 도 급 비 : 2,095,899천원 (3차 : 971,025천원)

❍ 시 공 사 : ㈜엔씨종합건설외 1개사

❍ C M 사 : ㈜한국종합기술외 1개사

보고내용(건설사업관리인)

❍ 관련공문 : 낙산및수유6배수(감리) 제19-308호(’19.11.21.)

- 송수관로 구간 사토장변경 실정보고 검토

1. 사토장 설계 현황

❍ 당초 설계도서상 송수관로 구간의 발생토사는 수도권 매립지로 전량 처리토록 설계됨.

- 잔토처리 수량 현황 : 906㎥

- 운반거리 현황

집하장	L=0.5km	한성여중	L=27.1km	개화IC	L=21.7km	거첨로	L=1.2km	수도권매립지
	V=20		V=50		V=52		V=20

※ 운반거리 합계 : L=50km

2. 사토장 변경 사유 및 대체지 조사

❍ 현장 발생토사가 암석 및 이물질이 혼입된 토사로서 매립지 반입조건에 부적합하여 사토장 변경필요

- 매립관리처-1104(2019.04.18)  반입불가 통보

❍ 공사현장 발생토사 반입이 가능한 사토장을 조사한바, 경기도 양평군 소재 사토장이 반입가능한 것으로 조사됨.

- 토석정보공유시스템 및 유관기관을 통하여 토사반입 가능여부를 조사한결과, 현장 공정계획과 부합되는 현장이 없음.

- 경기도 양평군 소재 사토장은 농업용 성토조성지이며, 인허가를 득한 부지로 현장토사 반입은 적정

사토장 위치 (양평군 양평읍 도곡리 229-3)	사토장 전경

3. 운반경로별 속도 및 단가산정

❍ 운반경로 (속도적용 : 서울시 가로별속도 및 표준품셈적용)

집하장	L=1.1km	떡전사거리	L=0.3km	시조사삼거리	L=8.01km	돌다리사거리	L=41.65km	사토장
	V=19.3		V=19.7		V=22		V=60

※ 운반거리 합계 : L=51.06km

❍ 운반단가는 당초 운반로 전부가 변경되는 경우로 대체된 운반거리를 품셈을 기준으로 산정한 단가에 낙찰율 적용(86.756%)

- 안전감사담당관-12880호(2018.09.28.)관련하여 운반비는 경비 비목으로 적용

4. **********************

공종명	규 격	단위	당 초		변 경		증 · 감
			수량	금액	수량	금액	수량	금액
합 계				21,736,000		23,001,000		1,265,000
1.직접공사비				14,814,006		16,988,406		2,174,400
잔토처리(토사) (0.7터파기동시상차)	24DT,집하장~매립지 (50.0km)	㎥	906	14,814,006			-906	-14,814,006
잔토처리(토사) (0.7터파기동시상차)	24DT,집하장~매립지 (51.06km)	㎥			906	16,988,406	906	16,988,406
2. 제잡비				6,921,994		6,012,594		-909,400

건설사업관리인 종합의견

❍ 송수관로 구간 현장 발생토사가 암석 및 이물질이 혼입된 토사로 매립지 반입이 불가함에 따라 대체 사토장을 선정한 사항으로 사토장 변경은 적정

검토의견(공사관리관)

❍ 공사계약 일반조건 제19조 3의 현장상태와 설계서의 상이로 인한공사 설계 변경사항에 해당

- 인허가를 득한 대체 사토장으로 변경

- 신규운반단가는 경비항목으로 적용

❍ 건설사업관리인 실정보고를 승인하고 설계변경 등 후속 절차 이행

붙임 : 건설사업관리인 실정보고 공문 1부.  끝.