문서번호	시설과-11869
결재일자	2019.11.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		시설과장	시설안전부장
문정주		송병욱	전결 11/26 代이용구
협조

「수유6배수지 건설공사」

송수관로 잔토처리 변경 검토 보고

2019. 11.

상수도사업본부

(시설안전부)

「수유6배수지 건설공사」

송수관로 잔토처리 변경 검토 보고

송수관 부설 발생토에 대한 사토장소 변경과 도심지 주택가 협소 이면도로의 현장여건으로 보행자 안전을 위한 운반수단 변경 등을 검토 보고 드림.

사업개요

❍ 규    모 : 배수지 확충 3,100㎥(기존 3,000 ㎥ ⇒ 6,100㎥)

송배수관부설 500~600㎜, 연장 990m

❍ 기    간 : ’17. 12. 13.~ ’20. 5. 30.

❍ 도 급 비 : 2,859백만 원

❍ 시 공 사 : 영동건설㈜ 외 1개사

❍ C    M: ㈜한국종합기술 외 1개사

보고내용(책임건설사업관리인)

❍ 관련공문 : 낙산및수유6배수(감리) 제19-294호(’19. 11. 15.)

- 송수관로 잔토처리 변경에 따른 실정보고 제출

❍ 송수관로 잔토처리는 수도권매립지로 운반토록 설계되었으나, 본 현장 발생토는 반입이 불허됨에 따라 반출 양과 시기가 부합하면서 현장과 근거리에 위치한 사토장을 별도 선정

***************************************

❍ 송수관 부설구간은 도로폭이 6m 이내로 협소하여 잔토 직상차를 위해 24톤 덤프 대기 시 보행자 통로 확보가 어렵고, 공정상 잔토를 현장에 적치 할 수 없어 중간 집하장(배수지)까지 15톤 덤프로 잔토를 임시 적치

- 중간적치장 운반량은 별도 기록 관리

❍ 송수관로(500㎜) 부설구간 발생 잔토 처리 변경 현황

****************************

**********************************************

※ 현황 사진

❍ 공사비 증감 현황(증 10,857천원, 신규단가는 낙찰률 적용)

(단위:원)

공종명	규 격	단위	당 초		변 경		증·감 (변경-당초)
			수량	금액	수량	금액	수량	금액
합 계				83,248,000		94,105,000		10,857,000
1.직접공사비				56,868,257		70,040,737		13,172,480
주간공사
소규모토사운반 (상차비포함)	로더0.25 L=20.5m	㎥	247	1,348,620			-247	-1,348,620
잔토처리 (현장~사토장)	백호0.4+DT24 (L=50.0km)	㎥	3,317	53,367,213			-3,317	-53,367,213
잔토처리 (현장~중간집하장)	백호0.7+DT15 (L=0.43km)	㎥			3,317	10,050,510	3,317	10,050,510
잔토처리 (중간집하장~사토장)	백호0.7+DT24 (L=38.7km)	㎥			3,317	57,609,656	3,317	57,609,656
야간공사
야간 토사운반 (현장~적치장)	백호0.4+DT15 (L=1.0km)	㎥	113	291,653			-113	-291,653
잔토처리 (적치장~사토장)	백호0.7+DT24 (L=49.5km)	㎥	113	1,860,771			-113	-1,860,771
야간 토사운반 (현장~적치장)	백호0.7+DT15 (L=0.43km)	㎥			113	417,987	113	417,987
잔토처리 (적치장~사토장)	백호0.7+DT24 (L=38.7km)	㎥			113	1,962,584	113	1,962,584
2. 제잡비				26,379,743		24,064,263		-2,315,480

건설사업관리자 종합의견

❍ 현장여건 반영에 따른 실정보고 검토결과, 수도권매립지로 반출하도록 설계된 잔토를 금회 선정한 중간집하장과 사토장으로 처리하고 향후 설계 변경 시 반영함이 타당

검토의견(공사관리관)

❍ 송수관이 500㎜ 대형관이고 부설구간이 혼잡한 도심지 밀집지역내 협소한 이면도로인 여건을 감안할 때, 보행자 안전 통행권 확보와 원활한 공정 추진 등을 위한 잔토 처리 변경 사항은 필요할 것으로 판단

- 공사의 이행 중 지질, 용수, 지하매설물 등 공사현장의 상태가 설계서와 다른 경우 공사설계 변경사항은 계약금액 조정사유에 해당

- 사토장 이동에 따른 운반거리 변경 등은 계약금액 조정사유에 해당

❍ 건설사업관리자 실정보고를 승인하고 설계변경 등 후속 절차 이행

붙임 : 건설사업관리자 실정보고 공문 1부.  끝.