문서번호	기전과-10256
결재일자	2019.11.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	기전과장
강민우	11/26 정판식

『2019년 동부 횡단보도 확충 교통신호기 공사』

설계변경 검토보고

2019. 11.

동부도로사업소

(기 전 과)

『2019년 동부 횡단보도 확충 교통신호기 공사』

설계변경 검토보고

「2019년 동부 횡단보도 확충 교통신호기 공사」와 관련 감리단으로부터 제출된 설계변경 요청사항에 대하여 검토하고 보고 드림.

관련근거

감리사(태영 2019(신)-188호, 2019. 11. 21.)

『2019년 동부 횡단보도 확충 교통신호기 공사』설계변경서류 제출

공사개요 및 설계변경 현황

공사개요

- 공 사 명 : 2019년 동부 횡단보도 확충 교통신호기 공사

- 도 급 자 : **********

- 도 급 비 : ************

- 공사기간 : 2019. 08. 14 ~ 2019. 11. 30.

- 감 리 원 : **********

설계변경 현황

- 설계변경(내역변경) 사유

· 보행자 편의를 위하여 보행신호등, 잔여시간표시기, 음향신호기 등

현장여건에 맞도록 공사물량에 대한 내역이 변동됨에 따라 변경.

- 주요변경 내역

연번	공 종		단위	수 량			금 액(원)
				당 초	변 경	증 감	당 초	변 경	증 감
*	**************	**	*	*	*	*	*******	*******	*******
*	****************	**	*	*	*	*	*********	*********	*********
*	******************	**	*	*	*	*	*******	*******	*******
*	********* **********************	**	*	**	*	***	*******	*	********
*	********* **********************	**	*	*	**	**	*	*******	*******
※ 기타 세부사항은 설계변경 내역서 참조

- 제경비

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
*******	*********	*********	*******
*****	*******	*******	*****
*****	*******	*******	***
*****	*******	*	********
*****	*******	*	********
****	*********	*********	*******
**** *****	*******	*******	*******
*******	*	*	*
**** *****	******	*	*******

공사비 변경 내용

구 분		당 초	변 경	증.감
총 공사비		*************	**********	*********
도급비	공 급 가 액	**********	**********	*********
	부가가치세	*********	*********	*******
	계	**********	**********	*********

※ 공사기간 변경 없음

감리원 검토의견

- 내역 변경에 따른 물량변경으로 설계변경 시행

보고자 의견

상기 감리원이 설계변경 요청한 사항을 검토한 결과 설계변경 요청내용이

적정한 것으로 판단되어 관리단속과에 변경계약하고자 합니다.

붙임 1. 설계변경 (업체)제출 공문 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 합의각서 1부. 끝.