문서번호	기전설비과-3392
결재일자	2019.11.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
이균형		김광찬	11/26 전영주
협조

- 노들섬 안전시설 설치 통신공사 -

설계변경(정산) 검토보고

2019. 11

한강사업본부

(기전설비과)

- 노들섬 안전시설 설치 통신공사 -

설계변경(정산) 검토보고

노들섬 하단부에 공공안전 시설을 설치하여 이용자의 안전과 편의성을 확보하고자 시행중인 「노들섬 안전시설 설치 통신공사」의 내용을 검토한 결과, 설계변경 사항이 발생되어 설계변경(정산) 후 준공 처리하고자 함.

공사개요

○ 공 사 명 : 노들섬 안전시설 설치 통신공사

○ 공사기간 : 2019. 10. 11 ~ 2019. 11. 30

○ 계약업체 : ****************

○ 계약금액 : ***************

○ 공사내용

- CCTV,비상벨 방송설비 설치에 따른 통신공사

설계변경 현황

○ 변경사유 : 제경비(국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료)                  미납으로 인한 감액(정산)에 따른 변경

○ 변경금액                                         (단위 : 원)

구 분		변경 전	변경 후	증 감	비고
도급비	공급가액	39,298,883	36,690,000	2,608,883(감)
	부가세	3,929,888	3,669,000	260,888(감)
	합 계	43,228,771	40,359,000	2,869,771(감)

보고자 의견

○ 검토결과 보험료 미납부로 정산 감액하여 준공하는 것이 적법하다고

판단됨

향후계획

○ 2019. 11. 26 : 설계변경 계약의뢰

○ 2019. 11. 30 : 공사준공

붙임 : 1. 변경내역서 1부

2. 변경합의서 1부.

3. 검증획인서 1부. 끝