문서번호	설비부-18835
결재일자	2019.11.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
이창근		여인웅	11/26 임정규
협 조

- 노들섬 특화공간 조성 전기공사 -

설계변경(총차5회,3차3회) 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 11.

도시기반시설본부

(설  비  부)

- 노들섬 특화공간 조성 전기공사 -

설계변경(총차5회,3차3회) 검토보고

『노들섬 특화공간 조성 전기공사』관련 하단부 조명설비 추가 및 미사용 보험료 감액 정산의 사유로 건설사업관리단으로부터 설계변경 서류가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고 드림
		ㅊ
	ㅊ

Ⅰ
		관 련 근 거

노들섬 특화공간 조성 관련 회의결과(2019.8.28.개최)

▷ 시민 안전에 지장이 없도록 하단부 조명시설 추가설치

노들섬 특화공간 조성 전기공사(설계변경) 계약심사 결과 통보

[도시기반시설본부-17221(2019.11.07.)호]

노들섬 특화공간 조성 전기공사 총차 및 3차 준공(정산) 설계변경 검토

[유탑-현장-19-1328(2019.11.22.)호]

Ⅱ
		공 사 개 요

공 사 명 : 노들섬 특화공간 조성 전기공사

공사위치 : 용산구 이촌동 302-6일대(중지도)

공사규모 : 지상3층, 연면적 9,385㎡

공사기간 : 총차 ’17.11.16.~’19.11.30. / 3차 ’19.1.28.~’19.11.30.

도 급 비

○ *************************************

○ *************************************

도 급 자 : **************

감 리 자 : ********************

Ⅲ
		설계변경 검토사항

변경사유

〇 노들섬 특화공간 조성 관련 회의(‘19.8.28.) 결과에 따라 하단부 조명설비 추가

*********************************************************

*************************************************

〇 ************************

〇 *************************************************

설계변경 사항

〇 공사비 세부항목 변경(총차)                                   [단위 : 원]

구 분	금 액			비고
	변경 전	변경 후	증ㆍ감액
재료비	***********	***********	*********
2. 노무비	*************	*************	*********
3. 경 비	***********	***********	***********
4. 일반관리비	***********	***********	**********
5. 이 윤	***********	***********	**********
6. 자재비	*****	**********	**********
7. 설계비	******	**********	**********
8. 총원가	*****************	*************	***********
9. 부가세	****************	***********	**********
10. ESC(물가변동)	***************	***********	*	간접비 물가변동 대상금액 제외
11. 합계	*************	*************	***********

〇 공사비 세부항목 변경(3차)                                    [단위 : 원]

구 분	금 액			비고
	변경 전	변경 후	증ㆍ감액
재료비	***********	***********	*********
2. 노무비	*************	*************	*********
3. 경 비	***********	***********	***********
4. 일반관리비	***********	***********	**********
5. 이 윤	***********	***********	**********
6. 자재비	*****	**********	**********
7. 설계비	******	**********	**********
8. 총원가	*****************	*************	***********
9. 부가세	***************	***********	**********
10. ESC(물가변동)	***************	***********	*	간접비 물가변동 대상금액 제외
11. 합계	*************	*************	***********

설계변경 금액

구 분	변경 전	변경 후	증ㆍ감액	비 고
총차	*************	*************	***********
3차	*************	*************	***********

Ⅳ
		검 토 의 견

건설사업관리단 검토의견

〇 전기공사 총차 및 3차 준공(정산) 설계변경 내용은 현장여건, 한강사업본부 요구사항에 부합하고 타당하다고 사료되며, 계약심사 결과 조정내용을 반영함

〇 노들섬 하단부 설계변경으로 추가계약(설계변경) 단가 적용기준은 낙찰률(86.7484%)을 적용하여 적정하게 산출 되었음

조치계획

〇 전기공사 변경에 대한 건설사업관리단 검토결과 적정하다고 보고되었으며 기술심사담당관 운영 계약금액조정 검증결과 과다 산출액이 없음을 확인함

〇 동 공사 건에 대하여 총무부에 설계변경 계약 의뢰하고자 함

*******************************************

************************************************

*************************

********************************

*******************************