문서번호	원수관리과-1655
결재일자	2019.11.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
김종원		정임근	11/26 서대훈
협 조
	주무관			유혜영
	주무관			김효준

“상수도본부 발족 30년, 수돗물통수 111년, 믿고 마시는 아리수!”

『강북취수장 시설물 유지보수공사』

설계 변경 시행 보고

2019.  11.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

『강북취수장 시설물 유지보수공사』

설계 변경 시행 보고

『강북취수장 시설물 유지보수공사』시행중 현장여건 및 법령에 따른 신규공정·제경비 등의 변경사항이 발생하였기 설계변경을 하고자 보고 드림.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 강북취수장 시설물 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2019. 5. 2. ~ 2020.4.30.

○ 계 약 일 : 2019. 4. 26.

○ 계약금액 : *************

○ 계 약 자 : **************

○ 주요공종 계약내역

- 취수장 시설물 정비(차양판,방호문,인젝터실 패널설치 등)

□ 설계변경 주요사항

○ 계약물량의 증감 및 신규공정 발생

신규공정	당초금액	변경금액	사유
1. 토공	1,260,114	52,786	터파기,다짐 등 감소
2.구조물공	2,157,984	730,748	구조물 보수량 감소
3. 시설물공	20,216,385	30,076,888	방화문,차양판 등 증가
4. 보수공	4,160,760	-	보수물량 미발생
5. 부대공	712,390	770,786	물량증가
6. 폐기물 및 고재처리	148,095	-32,799	폐기물 미발생 및 고재발생

○ 법령에 따른 제경비 항목 감발생

- 간접노무비, 산재보험료,고용보험료, 건강보험료, 연금보험료 등

□ 설계변경 금액

구 분	금액		증·감	비 고
	당초	변경
****	**********	**********	*	*********
***********************	**********	**********	**********
****** ****************	*********	*	**********

□ 주요 변경내역

○ 물량변경에 따른 순공사비 및 법령에 따른 제경비 증감내역

연번	공 종	금액		증·감	내 용
		당초	변경
****		**********	**********	*********	*********** *********
*	*****	*********	*********	*******	*******
*	*****	*******	*******	*******
*	****	*******	******	******
*	*****	*******	*	*******
*	*****	*******	*	*******
*	******	******	*	******
*	****	*******	*	*******
*	****	*********	*********	*******	*******
*	******	*******	*	*******	***
**************		**********	**********	*********	*******
**	*****	*********	*********	******
**	**	*********	*********	*********	****
**	******	*******	*******	*******	****
****		**********	**********	*	*
***		*********	*********	*	*
***		**********	**********	*	*

□ 조치계획

○ 상기 변경내용에 대해 자체 설계변경 심의위원회를 개최하고 심의 결과에 따라 설계변경 시행

붙임 : 1. 설계변경내역서 1부.

2. 계약금액 조정 검증확인서(기술심사담당관) 1부.

3. 고용산재완납증명서 1부. 끝.