문서번호	기전과-6652
결재일자	2019.11.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장	남부도로사업소장
양상규		임태수	11/26 김영삼
협조
	주무관		이태근

『2019년 교통사고 잦은 곳 개선 교통신호기공사』

설 계 변 경  검 토 보 고

2019. 11.

남부도로사업소

(기 전 과)

『2019년 교통사고 잦은 곳 개선 교통신호기공사』

설 계 변 경  검 토 보 고

2019년 교통사고 잦은 곳 개선 교통신호기공사와 관련, 책임감리원으로부터 시공물량 변경 및 보험료 정산을 위한 설계변경 요청이 있어 검토하여 보고드림.

Ⅰ		공 사 개 요

공  사  명 : 2019년 교통사고 잦은 곳 개선 교통신호기공사

공 사 위 치

- 관악구 신림동 1466-4(T-GIS명: 당곡사거리)

- 동작구 신대방동 342-21(T-GIS명: 신대방아파트)

- 금천구 시흥대로 371(T-GIS명: 말미사거리)

- 영등포구 시흥대로 635(T-GIS명: 대림사거리)

- 서초구 양재동 67-7(T-GIS명: 교육개발원입구)

- 금천구 시흥대로 304(T-GIS명: 군부대앞)

도  급  비 : *********************************

공 사 내 용 : 교통사고 잦은 곳 시설개선(교통신호기 신설 및 이설)

공 사 기 간 : 2019. 7. 1. ~ 2019. 11. 30.

시 공 업 체 : ***************

감 리 업 체 : *************

설 계 업 체 : ****************

Ⅱ		설계변경 검토내용

주요 설계변경 내용

연번	위치(TGIS명)	변경전	변경후	변경사유	증·감 금액(원)
01	당곡사거리	-차량등(1면4색)3조동시 신설 1조 -차량등(1면3색)3조동시 신설 2조 -차량등(1면2,3,4색)3조동시 이설 0조 -음향신호기(본체) 신설 4대 -음향신호기(압버턴) 신설 4ea -신호케이블지중1선 신설 141m -신호케이블가공1선 신설 93m -신호케이블가공1선 재설치 0m -신호케이블지중1선 재설치 0m	-차량등(1면4색)3조동시 신설 0조 -차량등(1면3색)3조동시 신설 1조 -차량등(1면2,3,4색)3조동시 이설 1조 -음향신호기(본체) 신설 10대 -음향신호기(압버턴) 신설 10ea -신호케이블지중1선 신설 69m -신호케이블가공1선 신설 45m -신호케이블가공1선 재설치17m -신호케이블지중1선 재설치79m	-차량등 및 보행등 일부 재사용에 따른 물량변경 -노후 음향신호기 교체에 따른 물량변경 -신호케이블 일부 재설치에 따른 물량변경	증 2,582,648
02	신대방아파트	-신호케이블지중1선 신설 68m -신호케이블가공2선 신설 22m -신호케이블지중1선 재설치20m -신호케이블가공2선 재설치 0m -전선관(PEΦ100mm)1열신설10m -소형고압블럭굴착배관 10m -맨홀(800x800x800)신설 0ea	-신호케이블지중1선 신설 0m -신호케이블가공2선 신설 0m -신호케이블지중1선 재설치52m -신호케이블가공2선 재설치23m -전선관(PEΦ100mm)1열신설5m -소형고압블럭굴착배관 5m -맨홀(800x800x800)신설 1ea	-신호케이블 일부 재사용에 따른 물량변경 -제어기 위치 변경으로 인한 보도굴착 물량변경	증 1,336,527
03	말미사거리	-차량등(1면4색)2조동시 신설 5조 -차량등(1면4색)3조동시 신설 2조 -음향신호기(본체) 신설 2대 -음향신호기(압버턴) 신설 2ea -전선관(PEΦ100mm)1열신설2m -전선관(PEΦ100mm)2열신설65m -소형고압블럭굴착배관 32m -스톤블럭굴착 23m -가로등주철거 1본 -가로등암이설 1본	-차량등(1면4색)2조동시 신설 2조 -차량등(1면4색)3조동시 신설 0조 -음향신호기(본체) 신설 6대 -음향신호기(압버턴) 신설 6ea -전선관(PEΦ100mm)1열신설0m -전선관(PEΦ100mm)2열신설0m -소형고압블럭굴착배관 0m -스톤블럭굴착 0m -가로등주철거 0본 -가로등암이설 0본	-차량등 및 보행등 일부 재사용에 따른 물량변경 -노후 음향신호기 교체에 따른 물량변경 -지중관로 재사용으로 인한 보도굴착 물량변경 -가로등통합 제외 (고압선 이격거리 제한)	감 6,271,100

연번	위치(TGIS명)	변경전	변경후	변경사유	증·감 금액(원)
04	대림사거리	-차량등(1면4색)3조동시 신설 2조 -차량등(1면4색)3조동시 이설 0조 -전선관(PEΦ100mm)1열신설23m -전선관(PEΦ100mm)2열신설46m -후강전선관2열야간신설42m -소형고압블럭굴착배관 79m -스톤블럭굴착 10m -아스팔트횡단굴착 42m -가로등주철거 2본 -가로등암이설 2본	-차량등(1면4색)3조동시 신설 0조 -차량등(1면4색)3조동시 이설 2조 -전선관(PEΦ100mm)1열신설21m -전선관(PEΦ100mm)2열신설0m -후강전선관2열야간신설0m -소형고압블럭굴착배관 21m -스톤블럭굴착 0m -아스팔트횡단굴착 0m -가로등주철거 0본 -가로등암이설 0본	-차량등 및 보행등 일부 재사용에 따른 물량변경 -지중관로 재사용으로 인한 보도 및 아스팔트 굴착 물량변경 -가로등통합 제외 (고압선 이격거리 제한)	감 19,061,930
05	교육개발원입구	-음향신호기(본체) 신설 0대 -음향신호기(압버턴) 신설 0ea -신호케이블지중1선 신설 336m -신호케이블지중2선 신설 29m -신호케이블지중4선 신설 0m -신호케이블지중3선 재설치0m -가로등주철거 0본 -가로등암이설 2본	-음향신호기(본체) 신설 4대 -음향신호기(압버턴) 신설 4ea -신호케이블지중1선 신설 81m -신호케이블지중2선 신설 11m -신호케이블지중4선 신설 120m -신호케이블지중3선 재설치7m -가로등주철거 1본 -가로등암이설 3본	-노후 음향신호기 교체 추가에 따른 물량변경 -신호케이블 일부 신설 및 재사용으로 인한 물량변경 -가로등 통합 추가로 인한 물량변경	증 8,720,008
06	군부대앞	-버스전용신호등 신설 0조 -차량등(1면3색)3조동시 신설 0조 -교통신호등지주신설(Φ350) 0본 -지주부착대 신설 0본 -신호케이블지중1선 신설 0m -전선관(PEΦ100mm)1열신설0m -소형고압블럭굴착배관 0m -가로등주철거 0본 -가로등암이설 0본	-버스전용신호등 신설 1조 -차량등(1면3색)3조동시 신설 1조 -교통신호등지주신설(Φ350) 1본 -지주부착대 신설 1본 -신호케이블지중1선 신설 89m -전선관(PEΦ100mm)1열신설5m -소형고압블럭굴착배관 5m -가로등주철거 1본 -가로등암이설 1본	-2019년 교통안전인프라 합동점검에 따른 공사 추가	증 4,072,172

※ 세부내역은 설계변경내역서 참조

보험료 및 기타 제경비 정산                                    (단위:원)

구 분	변 경 내 용	증·감 금액(원)
직접비 (재료비,노무비,경비)	- 공사금액 증감에 따른 증감액 발생	감 8,621,675
산재보험료 고용보험료	- 공사금액 증감에 따른 증감액 발생	감 459,131
건강보험료 연금보험료 노인요양보험료 기타경비	- 상용근로자 투입공사로 보험료 제외	감 9,591,570
안전관리비	- 안전관리비 실사용금액 반영	감 2,256,552
간접비 (제경비,일반관리비,이윤등)	- 상기항목에 의한 금액변동으로 간접비 차액 발생	감 5,911,954
소 계		감 26,840,882
부가가치세		감 2,684,088
합 계		감 29,524,970

설계변경금액                                                 (단위:원)

구분		당초	변경	증·감
도급비	공급가액	259,586,336	232,745,454	감 26,840,882
	부가가치세	25,958,634	23,274,546	감 2,684,088
	합계	285,544,970	256,020,000	감 29,524,970

책임감리원 기술검토 의견

- 각 현장여건에 맞게 물량 적용 및 변경하여 시공하는 것으로 시공물량 증·감에 따른 설계변경함이 타당함.

※ 책임감리업체 설계변경 제출 태영(신)2019-195(2019. 11. 25.)

Ⅲ		보고자 검토의견

책임감리원이 설계변경 요청한 사항을 검토한 결과,

- 각 현장여건에 맞게 작업물량 변경【노후 음향신호기 교체, 신호등·신호케이블 일부 재사용, 가로등 통합제외(고압선 저촉위험) 및 교통안전인프라 합동점검에 따른 물량 추가 등)】 및 제경비 정산 등으로 책임감리원의 설계변경 검토의견이 타당함으로 이를 반영하여, 설계변경을 시행하고자 함.

설계변경 후 준공(검사) 처리하여 해당사업을 완료하고자 함.

Ⅳ		향 후 계 획

2019. 11. 26. : 설계변경 계약의뢰(관리단속과)

2019. 11. 30. : 공사준공

붙임 : 1. 책임감리원 설계변경서 1부

2. 설계변경내역서 1부

3. 실정보고 사항 검토보고서 1부.  끝.

4. 제비율 검증확인서 1부.  끝.