문서번호	치수과-16678
결재일자	2019.11.26.
공개여부	부분공개
방침번호

★주무관		치수팀장		치수과장		안전건설교통국장
박철홍		김성신		민병기		전결 11/26 손경철
협조
	재무과장		홍명안
	계약팀장		양영종

★ ◉

「2019년 하수도 준설(물청소)공사(단가계약)」

설계변경(3차) 검토 보고

2019. 11.

성   동   구

(치 수 과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 □ 공약(약속)사업 □ 계속사업 ☑ 인센티브/공모사업 □
소통분야 고려사항		●	구민		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	전문가		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	이해당사자		:		유 □ ( ) 무 ☑
여성친화 도시		성 평 등 □ 안 전·편 의 □ 가 족 · 공 동 체 회 복 □ 여 성 참 여 □
기타 고려사항		일 자 리 □ 환경영향 □ 안 전 ☑ 유지비용 ☑ 바른 공공언어 □
		성 인 지 □ 취약계층 □ 장 애 인 □ 디 자 인 □ 갈등발생 요인 □
타자원 활용		●	중앙부처	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	서울시	:		유 ☑ ( 시비 재배정 ) 무 □
		●	기업	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	민간단체	:		유 □ ( ) 무 ☑
언론홍보 계획		기획보도 □ 보도자료 □ SDTV □ 성동뉴스레터 □ 성동구소식지 □
		기 고 문 □ 전자행정서비스 □ S N S □ 기타 (리플릿 등) □ 없 음 ☑
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

「2019년 하수도 준설(물청소)공사(단가계약)」

설계변경(3차) 검토 보고

우리 구에서 시행중인 『2019년 하수도 준설(물청소)공사(단가계약)』와 관련 시비 재배정에 따른 공사 물량 증·감에 대한 설계변경을 시행하고자 함

Ⅰ		사업현황

○ 사 업 명: 2019년 하수도 준설(물청소)공사(단가계약)

○ 사업기간: 2019. 3. 11. ~ 2019. 12. 31.

○ 공사개요: 하수관로 준설 5,245㎥, 세정 54,800m, 빗물받이 준설 9,990개소 등

○ 도 급 자: (주)제일토목 대표 김현녀

○ 도 급 비: 금1,332,280,000원(금일십삼억삼천이백이십팔만원)

Ⅱ		설계변경 사유

○ 준설공사 실정보고(마장도시재생)

- 사업비 400백만원(시비 재배정), 재생정책과-13316(2019.10.11.)호

- 마장동 도시재생활성화 지역 내 준설 사업비 반영

○ 준설공사 실정보고(하천준설)

- 사업비 240백만원(시비 재배정), 하천관리과-15444(2019.10.17.)호

- 중랑천, 청계천 하상준설 사업비 반영

Ⅲ		설계변경 내역

○ 도급비 변경 내역

(단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
총공사비	1,519,250,000	2,159,250,000	증640,000,000
도 급 비	1,332,280,000	1,972,280,000	증640,000,000
이 전 비	186,970,000	186,970,000	-

○ 주요물량 증·감 내역

공 종		단위	수 량				비고
			당 초	변 경	증 ․ 감
준설공	인력+흡입준설	㎥	1,500	1,700	증	200
	암거준설(기계)	㎥	2,100	2,200	증	100
	흡입준설	㎥	1,410	1,900	증	490
	바켓준설	㎥	235	450	증	215
	하천준설	㎥	8,350	18,203	증	9,853
물청소	하수관물청소	m	54,800	83,100	증	28,300
빗물받이준설공	빗물받이 흡입준설 1호	개소	2,000	1,500	감	500
	빗물받이 흡입준설 2호	개소	5,000	8,000	증	3,000
	빗물받이 인력준설 1호	개소	1,990	3,300	증	1,310
	빗물받이 인력준설 2호	개소	1,000	1,200	증	200

Ⅳ		조치의견

○ 상기 내용과 같이 시비(재배정) 사용에 따른 계약 물량 증·감을 반영하여 설계변경(3차)를 시행하고 향후 공사완료 후 정산처리하고자 함

붙임  1. 일상감사의견서 및 제경비검증확인서 각 1부.

2. 변경내역서(3차) 및 준설공사 실정보고 각 1부.  끝.