“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	계약변경 의뢰(국회대로 지하차도 소규모 지하안전영향평가)

우리시에서 시행중인 아래 용역에 대하여 다음과 같이 계약변경을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 국회대로 지하차도 및 상부공원화 소규모 지하안전영향평가 용역

나. 계 약 자 : ㈜ 다산이엔지

다. 계약변경내역

구 분	당 초	변 경	비 고
준공기한	2019. 12. 31.	2020. 04. 30.	4개월 증가
금액변경(원)	￦ 51,104,400	￦ 137,324,400	86,220,000 증액

라. 사유

- 비개착구간 지하안전영향평가 수행으로 인해 용역기간이 부족하게 되어 과업비 증액 및 준공기한을 연기하고자 함(귀책사유 : 서울특별시)

붙 임	1. 설계변경 방침 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 준공기한 연기의뢰서 1부.

4. 합의각서 1부. 끝.

	도로계획과장
주무관	이일주		민자사업팀장	조용상		도로계획과장	11/26 안대희
협조자
시행	도로계획과-16119	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 10층 도로계획과 (태평로1가)	/
전화	02-2133-8072	/전송	02-2133-0763	/	21zu@seoul.go.kr	/	부분공개(5)