문서번호	정수시설과-6045
결재일자	2019.11.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
노성제		김석정	11/27 김중영
협 조

태양광 발전시설 설치 사업 관련 실정 보고

2019. 11.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

태양광 발전시설 설치 사업 관련 실정 보고

우리 정수센터 태양광 발전시설 설치 사업과 관련, 공사기간 연장 사유가 발생하여 조치 계획을 보고 드림

□ 사업개요

◯ 사업기간: 2019. 5. ~ 2019. 12.

◯ 사업규모: 태양광 발전설비 150kW

◯ 사업위치: 송수펌프동, 탈수기동 및 자양취수장(염소저장실) 옥상

◯ 사업예산: **************************************

□ 추진현황

◯ 2019. 05. 17. 태양광 발전시설 설치 추진 계획 수립

◯ 2019. 08. 12. 실시설계 용역 완료

◯ 2019. 10. 01. 태양광 발전설비 조달구매 시행

◯ 2019. 10. 17. 전기공사 발주

◯ 2019. 10. 24. 공사 감리용역 발주

□ 문제점

◯ ‘태양광 발전설비 조달구매’의 계약자(*****)에게 DC 접속반을 계약자의 비인증 제품 대신 KS 인증제품으로 납품하도록 지시하였는데,

◯ KS 인증제품 제작업체가 국내에 한 업체밖에 없어서 해당 업체에 제품의 납기를 확인한 바 제작납품에 30일 정도 소요된다고 통보 받음.

◯ 위 내용대로 진행할 경우 계약기간 내에 사업을 완료할 수 없음.

□ 추진방안

◯ 본 태양광 설치 사업은 국비보조(지역지원) 사업으로서 주무기관인 한국에너지공단의 「신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 지침」에 맞게 추진함이 타당하다고 판단되므로,

◯ 화재에 취약한 DC 접속반을 KS 인증제품으로 설치하여 태양광 발전 시설의 안전과 품질을 확보할 수 있도록 관련 사업의 계약 기간을 연장하여 진행하고자 함.

◯ 계약기간 변경내용

구 분	계약업체	계약기간		비 고
		변경전	변경후
태양광 설비	*****	2019.10.4. ~ 2019.12.3.	2019.10.4. ~ 2019.12.24.
모니터링시스템	******	2019.10.4. ~ 2019.12.3.	2019.10.4. ~ 2019.12.24.
감리용역	*****	2019.10.30. ~ 2019.12.13.	2019.10.30. ~ 2019.12.24.
전기공사	****	2019.11.12. ~ 2019.12.26.	2019.11.12. ~ 2019.12.26.	변경없음

◯ 계약기간 연장에 대한 책임소재: 뚝도아리수정수센터

※ 우리 정수센터의 요청으로 발생된 사항임

□ 행정사항

◯ 행정관리과에 계약기간 변경 공문 시행

◯ 감리업체에 계약기간 변경 승인 통보

붙임  감리의견서 1부.  끝.