문서번호	지역건축안전센터-13279
결재일자	2019.11.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		건축물안전관리팀장	지역건축안전센터장
이동준		김갑규	11/27 김유식
협 조

- 2019년 재난취약시설 정밀안전진단 등 지원사업 -

동작구 사업변경 승인요청 검토 보고

2019. 11.

주택건축본부

(지역건축안전센터)

- 2019년 재난취약시설 정밀안전진단 등 지원사업 -

동작구 사업변경 승인요청 검토 보고

제2차 지원대상 선정 자문회의(2019.10.28.) 시 사업 승인된 동작구 사당3동 옹벽의 자치구 사업내용 변경신청서에 대하여 전문가 자문결과를 보고드림

Ⅰ		사업개요

❍ 사 업 명 : 재난취약시설 정밀안전진단 등 지원사업

❍ 사업기간 : 2019. 1. ~ 12.

❍ 사 업 비 : 254,000천원

❍ 사업내용

- 전문가 현장점검(찾아가는 안전점검 등) 결과 정밀조사 소견이 있는 건축물

- 노후 주택가 담장, 옹벽, 석축 및 정비구역 해제지역 내 위험 건축물

- 최근 위험 요인 발생으로 보수 ·보강 전 긴급응급조치가 필요한 건축물

Ⅱ		추진경위

❍ 2019. 10. 28. : 지원대상 선정 자문회의 개최(2차)

- 3개동 50,215천원 지원 (동작구 사당3동 옹벽 정밀안전진단 19,525천원 포함)

❍ 2019. 11. 13. : 동작구 사업변경 승인 요청(붙임1 참조)

- 사업변경 요청내역

자치구	주 소	시설물	사업변경 승인 요청내역		사업비 (천원)
동 작	***********	옹벽	(변경 전)	정밀안전진단	19,525
			(변경 후)	정밀점검 및 현황측량	11,910 (△7,615)

- 변경 승인요청 사유

· *******************************************************************************************************************************************

· ******************************************************************

Ⅲ		자문위원 검토결과

❍ 검토 위원(2인) : ************, ***********

❍ 검토 내용(붙임2 참조)

- *****************************************************************

- **************************************************************************************************

- ***************************************************************

Ⅳ		행정사항

❍ 전문가 서면자문 수당 지급: 200천원

- 산출 근거: 100,000원 × 2인 = 200,000원

- 예산 과목: 주택건축본부 지역건축안전센터, 건축물 예방적 안전관리 강화, 민간건축물 안전관리, 재난취약시설 정밀안전진단 등 지원사업, 일반운영비, 사무관리비 (201-01)

❍ (동작구) 사업 변경에 따라 기 교부된 금액에서 발생된 차액은 차년도 반납 조치

붙임: 1. 자치구 사업변경 계획서 1부.

2. 전문가 자문 의견서 1부.  끝.