문서번호	토목부-21676
결재일자	2019.11.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
권해엽		代황윤기	11/27 代박일연
협조

차선 도색 시공물량 정산 검토 보고

- 천호대로(광나루역) 확장공사 -

2019.11.

도시기반시설본부

(토목부)

차선 도색 시공물량 정산 검토 보고

- 천호대로(광나루역) 확장공사 -

인수기관 요청, 민원사항 등으로 추가 실시한 차선 도색에 대하여 실시공 물량으로 정산하고자 검토 후 보고드림.

※ 관련근거 : 천호수 제2019-217호(2019.11.13.)

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 천호대로(광나루역) 확장공사

○ 위    치 : 광진구 구의동 58-15 ~ 광장동 388-10(아차산역~광나루역)

○ 규    모 : 폭 6차로 → 10차로, 연장 900m(지하차도 580m 포함)

중앙버스전용차로 L=2,600m, 정거장 5개소

상징조형물 설치(높이 23.3m, 승강기 2대)

○ 사업기간 : 2010.10. ~ 2019.11.(7차 2017.07. ~ 2019.11.)

○ 도 급 비 : 59,455백만원(7차 14,775백만원)

Ⅱ		건설사업관리단 보고내용

○ 추진 근거

- 중앙버스전용차로 소성변형 긴급보수 검토보고(토목부-18597, 18.11.02.)

- 유관기관(서울지방경찰청, 광진구청), 현장점검 시 지적사항

날짜	제 목	주 요 내 용	관련근거
‘18.04.24	현장점검 검토의견 통보	○ 천호대로 연장 중앙버스전용차로 현장점검 검토의견(서울지방경찰청) 통보	도기본 -18-4055
‘18.07.02	교통안전시설 개선 통보	○ 교통안전시설 개선 설치 통보(하달) - 광진 아차산역사거리 북측	교통관리과-16164
‘19.07.15	민원사항 조치 요청	○ 교통안전시설(표지 등) 관련 민원	도기본 -19-8175
‘19.04.12	민원사항	○ 광진구청 요청(민원)사항 검토	도기본 -19-4063
‘19.08.29	민원사항	○ 버스중앙차로 민원사항 알림(광나루역)	광징구청 도로과 -10774

○ 차선도색 정산 현황(세부내역 감리단 검토의견 참조)

명 칭		단위	당 초(시공 前)				변 경(시공 後)				증-감
			아차 산역	광장 사거리	중곡동 남단IC	소계①	아차 산역	광장 사거리	중곡동남단IC	소계②	②-①
차 선 도 색	백(실)15㎝	m	57	30	75	162	231	299	118	648	486
	백(파)15㎝	m	-	1	-	1	-	11	-	11	10
	황(실)15㎝	m	-	-	-	-	62	453	182	697	697
	청(실)15㎝	m	-	-	-	-	62	453	182	697	697
	분(파)15㎝	m	-	-	-	-	-	900	-	900	900
	문자,기호	m	160	272	56	488	492	588	104	1,184	696
	횡단보도	m	-	54	75	129	-	187	75	262	133
	차선제거	m	-	-	-	-	68	594	-	662	662
		m	217	357	206	780	915	3,485	661	5,061	4,281

○ 교통시설 감리비 검토(제요율 제외 공종)

구 분	설 계	견 적	비 고
	*************	*
용역대가	***********	***********
공 종	**********	**********
산출근거	********** ***************	************* ********
적 용 안	*	********

○ 공사 수량 증·감

공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증·-감	비 고
백색(P4),실선(수동식)-야간	15㎝	m	8,178	8,664	486
백색(P4),파선(수동식)-야간	15㎝	m	5,543	5,553	10
황색(P4),실선(수동식)-야간	15㎝	m	9,744	10,441	697
청색(P4),실선(수동식)-야간	15㎝	m	9,578	10,275	697
청색(P4),파선(수동식)-야간	15㎝	m	313	1.213	900	(유색 유도선)
백색(P4),문자․기호(수동식)-야간	15㎝	m	7,783	8,479	696
백색(P4)횡단보도·주처정(수동식)-야간	15㎝	m	10,659	10,793	134
차선제거(건식흡입형,수동식)-야간	15㎝	m	14,618	15,280	662

○ 공사비 증·감                                   (단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
교통안전시설공	*******	*******	******
직접공사비	*******	*******	******	*
간접공사비	*******	*******	*****	*
제요율제외공종	******	******	*****
도 급 액	*******	*******	******	*
관급자재비	*	*	*
폐기물처리비	*	*	*
총 공 사 비	*******	*******	******	*

○ 감리단 종합검토의견

- 중앙버스전용차로 일부 구간(버스정차구간)에 아스콘 포장의 소성 변형이 발생함에 따라 시민과 운전자의 안전을 확보하기 위하여 긴급 복구를 시행하고 이 과정에서 불가피하게 발생한 차선도색 수량을 정산하고

- 중앙버스전용차로 개통 이후 유관기관 합동점검 결과 및 민원사항에 따른 추가 요청사항도 시공 물량을 정산하여 설계에 반영하는 것이 타당하다고 판단됨.

- 또한, 교통시설 감리비는 첨부 내용과 같이 교통안전시설 감리용역비 산출근거에 의거 실적 정산함이 옳을 것으로 판단되어 제요율 제외 공정으로 반영함.

Ⅳ		조치계획

○ 감리단의 검토의견이 타당하여 민원, 유관기관 요청 등에 의하여 추가로 실시한 차선 도색 물량에 대하여 정산하여 반영하고자 함.

붙임  건설사업관리단 검토 의견서 1부.  끝.