＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	중부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	『회현동2가 86번지 외 7개소 배급수관 정비공사』 준공기한 연기요청

1. 우리 사업소에서 시행하는 『회현동2가 86번지 외 7개소 배급수관 정비공사』와 관련한 사안입니다.

2. 노후 배급수관 정비 구간의 시공 방법 변경으로 부득이 준공기한을 연기하고자 하니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명: 회현동2가 86번지 외 7개소 배급수관 정비공사

나. 계약업체: ***************

다. 공사기간

○ 당초: 2019. 04. 17. ~ 2019. 11. 29.

○ 변경: 2019. 04. 17. ~ 2019. 12. 14.

라. 귀책대상: 서울특별시 중부수도사업소

마. 지체상금 부과여부: 미부과.

붙임  방침서 1부.  끝.

	급수운영과장
주무관	김재명		급수관리팀장	이훈재		급수운영과장	11/27 채재일
협조자
시행	급수운영과-23792	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 (장충동2가)	/
전화	3146-2159	/전송	3146-2189	/	noalias24@seoul.go.kr	/	부분공개(6)