문서번호	조경과-7742
결재일자	2019.11.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	주무관	조경과장
장숙희	代장숙희	11/27 김강환
협 조

- 2019년 서울대공원 숲가꾸기사업 -

공사 변경(정산) 보고

2019. 11.

서울대공원

조 경 과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

- 2019년 서울대공원 숲가꾸기사업 -

공사 변경(정산) 보고

「2019년 서울대공원 숲가꾸기사업」시행중 집행되지 않는 경비에 대하여 아래와 같이 변경(정산) 처리하고자 함.

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2019년 서울대공원 숲가꾸기사업

○ 기    간 : 2019. 07. 30. ~ 11. 30.

○ 위    치 : 막계동 산35번지 일대

○ 내    용 : 천연림 개량 80ha, 임내정리 20ha

○ 도 급 액 : ************

○ 도 급 자 : **************

□ 변경(정산)내용

○ 주요사항 : 국민연금보험료 등 제경비 정산

구 분	계	연금보험료	제경비 등
변경금액(천원)	2,640	2,200	440

○ 변경(정산)금액

구 분	당초	변경	증감	비고
공사금액(천원)	94,252	91,612	감2,640

□ 처리계획

○ 보험료 및 제경비 등에 대하여 위와 같이 변경(정산) 처리하고자 함.

붙임 : 1. 변경(정산)내역서 1부.

2. 제비율 검증확인서 1부. 끝.