투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	「노을 가족캠핑장 면 정비공사(전기)」 설계변경 시행

1. 공원여가과-1767(2019.11.27.)호와 관련입니다.

2. 「노을 가족캠핑장 면 정비공사(전기)」에 대하여 아래와 같이 설계변경 하고자 합니다.

가. 공 사 명: 노을 가족캠핑장 면 정비공사(전기)

나. 공사기간: 2019. 11. 5. ~12. 2.

다. 위    치: 노을공원 4, 5, 7번 광장(캠핑장 A, B, C구역)

라. 도 급 액: 금33,400,000원

마. 도 급 자: 주식회사 대광사업단 대표 박선희

바. 공사개요: 전기인입 신설 및 분전함 이전설치 등

사. 소요예산

(단위:원)

구 분		공 사 비(원)			비 고
		당 초	변 경	증 감
총 공 사 비		33,400,000	36,000,000	증 2,600,000
도급비	공 급 가 액	30,363,637	32,727,273	증 2,363,636
	부가가치세	3,036,363	3,272,727	증 236,364
	계	33,400,000	36,000,000	증 2,600,000

아. 변경사유: 현장여건 변동에 따른 물량조정 발생

자. 예산과목: 서부공원녹지사업소 공원여가과, 공원 녹지정책 개발 및 만족도 개선,         공원 유지관리 및 이용활성화(도시개발특별회계), 시 공원 유지관리 및 보수 정비         (도시개발특별회계), 시설비및부대비, 시설비

붙임  1. 설계변경 검토 보고서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 제비율 검증확인서 1부.  끝.

주무관	한소진		주무관	代천영자		공원여가과장	강현주		서부공원녹지사업소장	11/28 남길순
협조자	재무팀장	정동철
시행	공원여가과-1770	(		)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로 243-60	/
전화	02-300-5576	/전송	02-300-5581	/	eric0503@seoul.go.kr	/	부분공개(5)