문서번호	문화시설과-10323
결재일자	2019.11.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		문화시설2팀장		문화시설과장
이덕노		이현		11/28 박병현
협 조

서울연극센터 리모델링 및 증축을 위한 설계자문 TF팀 구성 계획(안)

2019.  11.

문 화 본 부

(문화시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

서울연극센터 리모델링 및 증축을 위한

설계자문 TF팀 구성 계획(안)

서울의 대표적인 문화공간인 대학로에 위치한 서울연극센터 공간 리모델링 및 증축을 통한 구조 및 기능보강으로 연극인의 교류 및 협업

공간으로 조성하는데 있어, 내실 있는 설계를 위하여 다양한 주체가 참여하는 설계자문 TF팀을 구성․운영하고자 함

Ⅰ		자문대상

❍ 위    치 : 종로구 대명길 3(명륜4가 1번지) (舊혜화동사무소)

❍ 건축규모 : 부지 495㎡, 연면적 1,112,64㎡ (지상4층)

❍ 공간구성 : 연극인 교류공간, 발표 및 연습공간, 아카데미룸 등

❍ 사업기간 : 2018.11 ~ 2021.9월 (착공 ’20.05, 준공 ’21.09)

❍ 리모델링 및 증축 현황

구 분	계	지상 1층	지상 2층	지상 3층	지상4층
면적	1,112.64㎡	296.96㎡ (90평)	296.96㎡ (90평)	296.96㎡(90평)	221.76㎡ (67평)
용도		∙ 연극 홍보라운지 ∙ 정보자료실 ∙ 열린북카페,사무실	∙ 아카데미룸(120.5㎡) ∙ 세미나실(51.17㎡) ∙ 공용랩실 (62.64㎡)	∙ 화이트박스 (238.81㎡)	∙ 운영사무실 (115.13㎡) ∙공유(주방,거실)

❍ 구    조 : 철근콘크리트구조

❍ 용    도 : 제2종근린생활시설

❍ 준공년도 : 1965년. 9월

❍ 지역지구 : 제3종일반주거지역, 문화지구, 지구단위계획구역

Ⅱ		추진경위

❍ ’18.11.27.            연극센터 리모델링추진 기본계획 수립

❍ ’18.12.06.            건축사업 적정성 사전검토 (도시기반시설본부 건축부)

❍ ’19. 3.20.            지명설계를 위한 정책심의 상정(도시공간개선단)

❍ ‘19. 2 ~ 4. 29       리모델링을 위한 정밀안전진단(진단결과: D등급)

❍ ‘19. 5	지명현상설계를 위한 건축정책위 소위원회 개최

❍ ‘19. 6.10	기술용역타당성 심사 (용역비: 152,291천원)

❍ ‘19. 7. 01            서울연극센터 리모델링 설계공모 공고

❍ ‘19. 9.19.	설계공모 (당선작 : 신 건축사사무소 (신호섭)

Ⅲ		통합 TF팀 구성(안)

□  개   요

❍ 회의개최 :  필요시 수시 개최

❍ 운영기간 :  통합 TF팀 구성 ~ 실시설계 완료일

❍ 장    소 :  서울연극센터 (2층 세미나실)

연번	구 분	성 명	분야/소속	연 락 처
1	연극인	박해성	연극 연출가 (상상만발 극장)	************* 메일: gabe.h.park@gmail.com
2	외부 전문가 (건축설계)	이순석	더블유 건축사사무소 (공공건축가)	************* 메일: rhess@hanmail.net
3		이민아	협동원 건축사사무소 (공공건축사)	************* 메일:hyupdongone@gmail.com
4	유니버설 디자인	이상곤	㈜엔아이엔지니어링 건축사사무소	************* 메일:lsg330310@naver.com
5	운영업체	박영도	서울문화재단 서울연극센터 매니저	02-473-9330 메일:ydpark1@sfac.or.kr
6	도시기반시설본부 (건축부)	박범규	문화시설과장	3708-2625

❍ 설계자문 TF팀 구성(안)

□ 논의 내용

❍ 건축의 컨셉, 콘텐츠, 공사방법, 설계방식, 설계계획 등

❍ 프로그램 운영 및 공간활용 방향 결정

❍ 지역특성 및 연극수요에 적합한 공간구성 및 방향제시

□ 구성 계획

❍ 구   성 : 연극인+외부전문가+유니버설디자인+ 운영업체+도기본(건축부)

❍ 구성인원 : 6명~8명 이내 (내부인원 : 문화시설과장, 공연예술팀장)

❍ 자료준비 및 발표 : 신건축사사무소 (신호섭)

서울연극센터 리모델링 조성

통합 TF팀 구성

외부 전문가 (건축설계)		연극인 도기본 (건축부)		설계사무소 서울유니버설 디자인		운영 업체 (서울문화재단)

□ 회의 진행

❍ 현장에서 설계전문가 설명 및 도면 검토, 자유 토론, 의견 청취 등

❍ 통합TF팀에서 논의된 내용 중 구성원들간 공감대가 형성된 안 채택

□ 자문결과

❍ 자문내용을 서울연극센터 리모델링 및 증축 설계에 반영

Ⅳ		추진일정

❍ ‘19. 11.15 ~ ’20.5.15      기본 및 실시설계 (6개월)

❍ ’19.12. ~  ‘20. 4           서울연극센터 설계자문 TF구성 및 운영

❍ ‘20. 5 ~  ’21.9.            공사시행(16개월)

❍ ‘21. 10.	재개관

Ⅴ		행정사항

❍ 소요예산(1회당) : 850천원

- 참석수당 : 750천원(150천원*5명)   *2시간 이상 시 1인당 150천원

- 다 과 비 : 100천원

- 예산과목 : 문화시설과, 문화도시기반조성, 문화예술시설 건립, 평화문화진지운영

사무관리비

붙 임 : 당선작 및 현황사진 1부.  끝.

< 붙 임 >

당선작 및 현황사진

【 건물전경 및 내부 현황 】
【 당선작 : 신건축사사무소 신호섭 】
조감도