투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(하남선 1-2공구 실정보고(본선 종점부 보행자 신호등 이설비 반영) 승인 통보)

1. 업무지시현장 : 하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 주식회사 대한콘설탄트

2. 작 성 일 자 : 2019-11-28 10:11:21

3. 지 시 내 용

가. 대한(하남) 제19-333호(2019.10.31.)와 관련입니다.

나. 하남선(5호선 연장) 1-2공구 건설공사와 관련하여 본선 종점부 보행자 신호등 이설비 반영에 관한 실정보고 사항에 대해 귀 건설사업관리단의 검토의견과 같이 승인하오니 향후 설계변경 시 반영될 수 있도록 조치해 주시기 바랍니다.  끝.

주무관							서재원			토목1과장					11/28 윤방식
협조자				주무관						엄상민					주무관							노권호
시행			도시철도토목부-12383									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96) 프리미어플레이스 9층															/
전화		02-772-7103						/전송			02-772-7306					/	seojw83@seoul.go.kr												/	대시민공개