투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	설계변경(6차1회) 및 준공기한 연기 의뢰(신상도 지하차도 확장공사)

우리부에서 시행 중인「신상도 지하차도 확장공사」에 대하여 아래와 같이 설계변경(6차1회) 및 준공기한 연기 계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명: 신상도 지하차도 확장공사

2. 계약금액: 11,964,876,000원(6차: 2,550,000,000원)

3. 공사기간: 2007.12.31. ~ 2020.12.31.(6차: 2018.12.15. ~ 2019.12.31.)

4. 계 약 자: (유)한백종합건설 외 1개사(대표: 이진일)

5. 설계변경 내역

구 분		당 초	변 경	비 고
계약금액	총차	11,964,876,000원	11,964,876,000원	변경 없음
	6차	2,550,000,000원	2,452,990,000원	감 97,010,000원

- 변경사유: '19년 예산에 맞추어 총차 물량 내 6차 물량 조정

6. 준공기한 연기내역

구 분		당 초	변 경	비 고
공사기간	총차	2007.12.31. ~ 2020.12.31.	2007.12.31. ~ 2020.12.31.	변경 없음
	6차	2018.12.15. ~ 2019.12.31.	2018.12.15. ~ 2020.6.30.	증 182일

- 연기사유: 6차 공사 지연으로 준공기한이 도래함에 따라 준공기한 연기 필요

7. 예산과목: 안전총괄본부 도로계획과, 도로 건설, 간선도로망 확충(도시개발특별회계), 신상도 지하차도 확장, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임  1. 설계변경 및 준공기한 연기 검토보고서 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

	방재시설부장
주무관	이시연		방재시설과장	代김상용		방재시설부장	11/28 이임섭
협조자	주무관	김상용
시행	방재시설부-17776	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)프리미어플레이스빌딩 14층	/
전화	02-3708-8764	/전송	02-3708-8756	/	siyeon0907@seoul.go.kr	/	부분공개(5)