문서번호	기전설비과-3443
결재일자	2019.11.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
이균형		김광찬	11/28 전영주
협조

- 노들섬 안전시설 설치 전기공사 -

설계변경(정산) 검토보고

2019. 11

한강사업본부

(기전설비과)

- 노들섬 안전시설 설치 전기공사 -

설계변경(정산) 검토보고

노들섬 하단부에 공공안전 시설을 설치하여 이용자의 안전과 편의성을 확보하고자 시행중인 「노들섬 안전시설 설치 전기공사」의 내용을 검토한 결과, 설계변경 사항이 발생되어 설계변경(정산) 후 준공 처리하고자 함.

공사개요

○ 공 사 명 : 노들섬 안전시설 설치 전기공사

○ 공사기간 : 2019. 10. 14 ~ 2019. 11. 30

○ 계약업체 : *****************

○ 계약금액 : ************

○ 공사내용

- CCTV,비상벨 방송설비 설치에 따른 전기공사

설계변경 현황

○ 변경사유

- 공사추진 중 현장여건에 따른 변경(증·감)으로 내역조정 필요

- 제경비(국민건강보함료 등) 감액(정산)에 따른 변경조정 반영

○ 설계변경 금액                                      (단위 : 원)

구 분		변 경 전	변 경 후	증 감
도급비	공급가액	**********	**********	***********
	부가세	*********	*********	***********
	합계	***********	***********	***********

○ 주요 변경내역

공 종	당 초	변 경	변경사유
함체 설치	-함체 4회로 : 3면 -함체기초 : 3개소	-함체 8회로 : 5면 -함체기초 : 5개소	도기본 지급자재 추가설치
배관 공사	-터파기,되메우기(인력+기계) : 0m -터파기, 되메우기(인력) : 0m	-터파기,되메우기(인력+기계) : 388m -터파기, 되메우기(인력) : 215m	설계누락
제경비	-국민건강보험료: 1,743,078원 -노인장기요양보험료: 148,335원 -국민연금보험료: 2,428,437원 -퇴직공제부금: 1,241,201원	-국민건강보험료: 329,770원 -노인장기요양보험료: 28,040원 -국민연금보험료: 459,450원 -퇴직공제부금: 0원	-사후정산

보고자 의견

○ 현장 여건에 따른 물량증·감 변경내역 및 제경비(국민건강보험료 등) 집행여부 확인 결과 설계변경(정산) 시행 후 준공 처리코자 함.

향후계획

○ 2019. 11. 28 : 설계변경 계약의뢰

○ 2019. 11. 30 : 공사준공

붙임 : 1. 변경내역서 1부

2. 변경합의서 1부.

3. 검증획인서 1부. 끝