문서번호	기전과-10425
결재일자	2019.11.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
주무관	기전과장
이지영	11/28 정판식

교통안전표지 원인자부담공사 변경승인 검토 보고 「잠실올림픽아이파크 공사중 교통안전시설물 설치공사(안전표지)」

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 11.

동부도로사업소

(기전과)

교통안전표지 원인자부담공사 변경승인 검토 보고

잠실올림픽아이파크 공사중 교통안전시설물 설치공사(안전표지) 원인자부담공사 관련 설계 변경승인 요청에 대하여 검토하고 보고 드림.

공사개요

○ 공 사 명 : 잠실올림픽아이파크 공사중 교통안전시설물 설치공사(안전표지)

○ 공사위치 : 송파구 풍남동 388-7번지 일대

○ 공사기간 : 승인일로부터 ~ 2019. 12. 31.

○ 원인자 및 업체현황

구 분	원 인 자	설 계	감 리	시 공 사
안전표지	풍납우성아파트주택재건축정비사업조합	㈜동림티엔에스	㈜동림티엔에스	㈜다물그린

검토내용

○ 규제심의 : 서울지방경찰청 교통관리과-31513호(2017.11.06.)

서울지방경찰청 교통관리과-26943호(2019.10.28.)

【개선내용】

- 2단 횡단보도 운영, 신호기(차/보)위치조정, 안전표지 및 노면표지        개선, 안전지대제거 교통섬 신설

- 재건축인한 도로확장에 다른 차로조정 및 신호등 설치

○ 변경사항 : 토목선행공정이 진행되지 않아 공기가 부족하여 공기 연장 신청

- 준공일 변경

구 분	원 인 자	당초 준공일	연기 요청일	비 고
안전표지	풍납우성아파트주택재건축정비사업조합	~2019.11.30	~2019.12.31

○ 승인조건

- 승인일로부터 준공승인 후 인수전까지 안전관리 및 사고에 대한 책임은 원인자에게 있음

- 교통사고 방지를 위하여 공사전 충분한 공사안내 홍보, 안내표지판 설치 등 준수

- 공사 작업구간에 통제수를 배치하여 교통혼잡 방지 철저

- 야간공사시 공사 구간임을 인지 할 수 있도록 밝은 조도유지

- 해당 승인사항에 대한 공사완료시 준공승인 서류를 제출하여여 하며, 변경사항(교통안전시설 심의 등)이 있을시 별도 협의하여야 함

- 교통안전표지 설치·관리 지침 및 원인자 준수사항 이행 철저

- 교통안전시설 자료관리시스템(T-GIS) 입력완료 후 준공승인 요청

검토의견
○ 풍납우성아파트재건축정비사업조합에서 시행하는 잠실올림픽아이파크         공사중 교통안전시설물 설치공사(안전표지) 준공일 변경요청에 대하여        현장 확인 및 승인서류를 검토한 바, 적정하므로 조건부 승인처리하        고자 합니다.

붙임 : 1. 서울지방경찰청 규제심의 공문 사본 1부.

2. 설계내역서 1부.

3. 설계도면 1부.

4. 변경승인 요청 공문 사본 1부.  끝.