문서번호	서울숲공원지원과-2191
결재일자	2019.10.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	서울숲관리팀장	서울숲공원지원과장
이정호	강명환	10/31 송복식
협 조
	★재무팀장		곽선아

『서울숲 수변(중앙)호수 수질개선사업 폐기물 처리 용역』

준공기한연기 검토보고

2019. 10.

동부공원녹지사업소

(서울숲공원지원과)

『서울숲 수변(중앙)호수 수질개선사업 폐기물 처리 용역』

준공기한연기 검토보고

서울숲공원지원과에서 추진 중인「서울숲 수변(중앙)호수 수질개선사업 폐기물 처리 용역」과 관련하여 준공연기 사항이 발생하여 아래와 같이 검토보고 드림

□ 용역개요

❍ 용 역 명 : 서울숲 수변(중앙)호수 수질개선사업 폐기물 처리 용역

❍ 위    치 : 서울시 성동구 서울숲2길 8-15

❍ 용역기간 : 2019. 8. 05. ~ 2019. 11. 02.

❍ 계약금액 : ***********

❍ 계약업체 : ***********

❍ 용역내용 : 폐기물 운반 및 처리

□ 검토내용

❍ 연기사유

- 연못 준설토가 충분히 건조되지 않아 외부반출이 불가능한 상황으로  준설토의 추가 건조기간이 필요함

❍ 준공기한 변경

- 당초 : 2019.08.05. ~ 2019.11.02.

- 변경 : 2019.08.05. ~ 2019.11.29.(27일 연장)

❍ 지체상금 부가 검토

- 연기사유 귀책소재 : 동부공원녹지사업소

- 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 보고자 의견

❍ 상기와 같이 용역 준공기한을 변경하여 공사 추진에 만전을 기하고자 함.

붙임  준공기한 연장요청 공문 1부.  끝.