투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	변경계약 의뢰 (쉴드TBM 경제성 확보 용역)

우리부에서 시행 중인 「쉴드TBM 활성화를 위한 경제성 확보 방안 용역」에 대한 계약을 아래 같이 변경요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 쉴드TBM 활성화를 위한 경제성 확보 방안 용역

나. 계 약 자 : (사)한국터널지하공한학회 유한규

다. 계약금액 : 금184,651,000원

라. 용역기간 : 2018.06.01. ~ 2019.11.30.

마. 변경내용

구 분	당 초	변 경	증․감
용 역 비	184,651,000원	234,651,000원	증) 50,000,000원
용역기간	‘18.06.01~‘19.11.30	‘18.06.01~‘20.05.31	6개월 연장

바. 변경사유 : 용역결과에 대한 관련기관과의 논의 및 공론화를 위한 소요기간 반영

사. 예산과목 : 도시철도건설사업, 쉴드TBM활성화를 위한 경제성 확보방안. 시설비

도시철도건설사업, 쉴드TBM 기술발전방안 마련. 시설비 (2020년)

붙임 : 1) 용역 변경(기한 및 과업내용) 검토보고서 1부.

2) 합의각서 1부.

3) 내역서 및 예정공정표 1부.  끝.

	도시철도계획부장
주무관	이경훈		계획과장	김동철		도시철도계획부장	11/27 김진팔
협조자
시행	도시철도계획부-10468	(		)	접수		(		)
우	04520	중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 10층(도시철도계획부)	/
전화	02-772-7133	/전송	02-772-7304	/	lkh00n@seoul.go.kr	/	부분공개(5)